문서번호	시설과-11031
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
최이영		김도섭	12/21 강신재
협조

「국사봉배수지 건설공사」

기존 시설물 철거수량 변경관련 실정보고

2016. 12.

상수도사업본부

(시  설  과)

「국사봉배수지 건설공사」

기존 시설물 철거수량 변경 관련 실정보고

국사봉배수지 사업부지 상도근린공원내 등산로 주변 기존 시설물 철거수량 변경 등으로 발생된 감액분에 대한 실정을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 도 급 비 : 8,873백만원(1차:204백만원)

○ 사업기간 : 2016. 12. 1.~2019. 5. 19.

○ 공사개요 : 배 수 지 12,000㎥(송배수관 700~800㎜, 연장 3.0㎞)

○ 시 공 사 : 청광종합건설㈜ 대표 허 숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 2개사 대표 이우정

□ 보고요지

○ 기존 구조물깨기 변경 등

-  현장사무실 기초콘크리트깨기, 배수로철거 삭제

(당초) 97.6㎥  →  (변경) -      (감 97.6㎥)

○  품질관리활동비 변경

-  공사기간을 고려한 비용계상

(당초)  2개월  →  (변경) : 1개월 (감 1개월)

□ 보고내용

○ 기존 구조물깨기 등 수량 감 조정

- 사업부지내 상도근린공원 등산로 주변 기존 배수로 철거는 이용 시민의 충분한 사전안내 홍보 이후 철거토록 하기 위해  2차 공사분(17년도)으로 조정하고,

- 현장 가설사무실 기초 콘크리트 깨기는 최종 공사 준공전에 시공되어야 할 공종이므로 향후 공사 물량으로 조정이 필요한 사항임.

○ 품질관리활동비 감 조정

- 2016년도 1차분 공사기간은 착공일로부터 1개월이므로 품질관리활동비(중급 1인)는 2개월에서 1개월로 감 조정 코자 함.

	< 등산로 주변 전경>
배 수 로 (종)		배 수 로 (횡)

□ 공사비 증,감 현황

구분	당 초		변 경		증감액
	물 량	금 액	물 량	금 액
도급공사비		204,083		191,400	감) 12,683
1. 도급공사비		149,904		141,754	감) 8,150
1)기존시설물 철거	1식	138,004	1식	138,004	-
2)안전시설	1식	270	1식	-	감) 270
3)기존구조물깨기	1식	4,130	1식	-	감) 4,130
4)부대시설공	1식	7,500	1식	3,750	감) 3,750
2.조경공사	1식	3,911	1식	3,351	감) 560
직접공사비 계	1식	153,815	1식	145,105	감) 8,710
제잡비 및 부가세	1식	50,268	1식	46,295	감) 3,973

□ 건설사업관리 기술자 검토내용

○ 국사봉배수지 건설공사 (장기계속계약:1차분)공사시 등산로의 확보가 곤란하므로 시민편의를 고려하여 일부 공정의 조정이 필요하며,

○ 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여는 설계변경 시 반영하여 공사추진에 만전을 기함이 타당하다고 사료됨.

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 5항에(공정계획의 변경) 등

□ 조치의견

○ 상기 책임건설사업관리자 실정보고의 검토사항이 타당하므로 추후 설계변경시 반영토록 하고자 함.

붙임 : 현장실정보고(건설사업관리 제16-03) 1부. 끝.