함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사당배수지 건설공사 설계변경 시행(1차분)

우리 본부에서 시행중인『사당배수지 건설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차분)을 시행코자 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 사당배수지 건설공사

2) 공사개요 : 배수지 5,000㎥(송배수관 400~500㎜, 연장 1.7㎞)

3) 공사기간

․ 전체분 : 2016. 12. 6.~2019. 5. 19.

․ 1차분 : 2016. 12. 6.~2016. 12. 31.

4) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

5) 계 약 자 : ㈜한양아크라임 외 1개사

나. 설계변경 내역 및 사유

1) 설계변경 내역

․ 전체분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	6,518,668,800	6,518,668,800	-
도 급 비	4,849,729,800	4,849,729,800	-
관급자재비	969,686,000	969,686,000	-
이설비및기타	699,253,000	699,253,000	-	교통수립용역포함

․ 1차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	84,000,000	6,700,000	-77,300,000
도 급 비	84,000,000	6,700,000	-77,300,000
관급자재비	-	-	-
이설비및기타	-	-	-

2) 변경사유

○ 가설울타리, 홀딩도어 설치 및 기존 파고라 철거 변경

○ 시공 상세도 작성 반영

붙임 :  1. 설계변경 검토의견서 1부.

2. 설계변경 기술검토서 1부.

3. 설계변경현황 설명서 1부.

4. 설계변경 내역서(1차분) 1부.

5. 합의서 1부.

6. 현장 실정보고 1부.  끝.

주무관	윤걸		시설과장	김도섭		시설안전부장	강신재		경영관리부장	12/21 정진일
협조자	주무관	배현진		주무관	김성민		재무회계과장	박병식
시행	시설과-11042	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	대시민공개