함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차) 및 차수별 금액변경 시행(마천동외14개동상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 아래 공사에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고 다음과 같이 설계변경(2차) 및 차수별 금액변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 마천동외14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 제일토건(주)   대표 맹흥재

다. 공사기간 : 2016.06.21. ~ 2016.12.31.(총부기기한 2016.06.21.~2017.06.30.)

라. 금액 내역

구 분	당초	변경	비 고
총부기금액	***********	***********	총부기금액 변경없음
1차 금액(2016년)	***********	***********	증 113,588,000
2차 금액(2017년)	***********	**********	감 113,588,000

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증․감 및 신규공종발생

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙임  1. 설계변경 심의결과 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	12/22 代장성만
협조자
시행	급수운영과-24070	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	부분공개(7)