건설공사 설계변경 사전심의서

부분공개(7)

1. 공사명 : 2016년 마천동외14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

신청부서명	급수운영과
작 성 자	이 덕 규
제 출 일	2016. 12. 22

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2016. 12. 22(목)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

전명수

12/22

전명수

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

담    당

주무관

이덕규

이덕규

설계 변경 심의 설명서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 마천동외14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D=13~300㎜, L= 1,940m

변경 D=13~300㎜, L= 1,789m

○ 공사기간 : 2016.06.21 ~ 2017.06.30

○ 도 급 비 : 당초 535,947,560원

변경 535,947,560원(총부기금액 변경없음)

○ 계약상대자 : 제일토건(주)  대표 맹흥재

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 변경

- 물량 증가 : 아스팔트 포장절단 등 공종별 물량 증가

- 물량 감소 : 콘크리트 포장절단 등 공종별 물량 감소

○ 신공종 발생

- 당초 계약되지 않은 신공종 발생

: 부단수천공 분기점분기(500*20)외 57개 공종(사급자재포함)

□ 설계변경 및 차수별 금액내역

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총계약금액	535,947,560	535,947,560	금액변경 없음
1차 금액	400,000,000	513,588,000	2016.06.21 ~ 2016.12.31
2차 금액	135,947,560	22,359,560	2017.01.01 ~ 2017.06.30

따로붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.