문서번호	현장민원과-591
보존기간	년
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
정영환		김회중	03/20 김광식
협 조

2014년 수도계량기 교체 정비 계획

2014. 3

강남수도사업소

요  금  과

2014년 수도계량기 교체 정비 계획

만기(8년)를 도래한 수도계량기와 동파 및 고장 등 이상계량기를 적기에 신속히 교체 정비함으로써 아리수 사용량 계측 신뢰도를 제고하여 민원발생을 예방하고 세수 확보와 유수율 향상에 기여하고자 함

Ⅰ		현 황

1. 수도계량기 수전 현황

(단위 : 전)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	75mm 이상대형
198,363	159,886	12,006	10,082	5,734	6,933	2,058	1,664
100%	80.6%	6.05%	5.08%	2.89%	3.5%	1.04%	0.84%

※ 2014. 2월 기준 (공설소화전 : 6,879 미포함)

2. 인력 현황

(단위 : 명)

구 분	교체인력	인 력 현 황
사업소직원	2	고장 및 장애수전 교체
위탁 업체	5	만기,동파, 폐전계량기 교체 및 철거

3. 예산(사업비)

(단위 : 천원)

계	민간위탁비	장애수전 정비비	재료비
443,659	384,259	52,200	7,200

Ⅱ		‘13년 수도계량기 정비실적

1. 만기 수도계량기 교체

(단위 : 천원)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
목 표	14,649	10,461	1,156	1,081	630	952	369
실 적	19,283	16,321	1,187	645	617	418	95

2. 이상 수도계량기 교체

(단위 : 천원)

구 분	계	회전멈춤	회전불량	침비정상	동파	검정	기타
교체수전	2,446	352	337	19	1,224	77	437

※ 기타 : 몸통누수, 유리파손, 문자불명, 소음 등

3. 장애수전 정비 실적 : 182전(100%완료)

Ⅲ		‘14년 수도계량기 정비 계획

1. 정비개요

❍ 추진기간 : 2014. 3월 ～ 12월

❍ 목 표 량 : 7,128전(만기4,596전, 이상수전2,500전, 장애수전32전)

❍ 정비대상 : 소형 수도계량기(50mm이하)

※ 대형수도계량기(50mm 초과)는 수도자재관리센타에서 교체

2. 세부 정비 계획

만기 수도계량기 정비계획

❍ 만기 수도계량기 교체

- 근  거 : 계량에관한 법률 제20조 및 동법시행령 제21조

※ 검정유효기간 만료(만기) : 8년(50mm이하)

- 목표수량 : 4,596전

❍ ‘14년 목표수량 선정 현황

(단위 : 전)

‘14년 만기 대상	교체 대상 수전	교체 유보 수전				비 고
		소계	재개발, 재건축	옥내노후 (벽체)	기타 (내부수전)
13,377	4,596	8,781	736	7,606	439

- 재개발, 재건축 : 개포시영아파트, 서초구 우성아파트 등

- 옥내노후  수전 : 개포주공아파트, 서초구 신반포 아파트 등

❍ 교체수전 구경별 현황

(단위 : 전)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
4,596	2,923	413	663	306	271	20

❍ 정비방법 : 민간위탁 교체공사 업체에 교체 작업지시

※ 민간위탁 교체 공사 현황

- 공 사 명 : 2012년 강남수도사업소 관내 수도계량기 교체 공사

- 계약기간 : 2012. 6. 20 ~ 2014. 6. 30

- 계약금액 : 788,983,560원

․1차수(‘12. 7.15 ~ 12.31)  : 132,099천원

․2차수(‘13. 1. 1 ~  6. 30)  : 300,095천원

․3차수(‘14. 1. 1 ~ 6. 30) : 356,789천원

- 계약업체 : (주)태우건설, 건웅토건

이상 수도계량기 정비계획

❍ 대    상 : 동파, 회전멈춤, 회전불량 등이 발생한 수도계량기

❍ 교체수량(예상치) : 2,500전(고장 1,300, 동파 1,200전)

❍ 교체인력

- 계량기 교체 전담직원 2명

※ 동파교체는 민간위탁업체에서 교체

❍ 교체방법

- 계량기 검침 시 고장일 경우 요금과 심사담당자 확인 후 교체

요청(아리수인포시스템)에 의해 처리

- 교체사유, 기물번호, 지침, 수도사용 여부를 확인 후 교체

- 유리파손, 열손상 등 조례위반 의심 수전은 심사담당자의 조례

위반 등 검토 후 교체

교체장애 수전 조치계획

❍ 대    상 : 교체 및 검침 장애수전

❍ 조치수량 : 204전

❍ 조치방법

- 아리수인포시스템에 별도 장애 수전관리 대장에 등록

- 장애사유가 서울시 귀책(심도장애, 구경축소, 확대 등)

→ 공사부서 이첩(급수운영과, 시설관리과)

- 장애사유가 수용가 귀책(노후 아연도강관, 벽체형 밸브 고장 등

계량기 교체시 누수로 사유재산 피해 발생되는 수전)

→ 서울특별시 수도조례 제40조에 의거 소유자에게 교체토록

권고(‘14. 4월 공문 통보 예정)

※ 옥내 급수관 노후로 교체 장애 발생의 경우 수도관 개량에         따른 공사비 지원 사업에 대해 적극 홍보토록 안내문 첨부

Ⅳ		행정사항

1. 계량기 교체업체 지도 감독 강화

❍ 계량기 교체업체 지도 점검 실시 : ‘14. 5월 예정

- 계량기 교체공사 시방서 및 계약특수조건 이행여부 확인

- 교체공사 시방서 및 계약특수조건 위반사항 발생시 위약금 부과

- 수도계량기 반납 및 수령 내역 등 점검

❍ 정기교육 : 월 1회 이상 실시(동절기 및 휴가기간 제외)

※ 수시 및 특별교육 : 현안 및 동절기 등 특별사업 수행시 교육

❍ 대    상 : 위탁업체 교체 직원(5명)

❍ 교육내용 : 교체업무 요령, 고객서비스 요령 등

2. 2014년 수도계량기 교체 공사 발주

❍ 공 사 명 : 2014년 강남수도사업소 관내 수도계량기 교체 공사

❍ 공사기간 : 2014. 7. 1 ~ 2016. 6. 30(2년)

❍ 공사발주(본부 계획에 의거 추진)

- 2014. 5월 : 발주 예정.  끝.