투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(경의선숲길 식생보완공사)

1. 공원운영과-20914(2016.12.22.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『경의선숲길 식생보완공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경코자 합니다.

가. 공 사 명 : 경의선숲길 식생보완공사

나. 위    치 : 마포구 와우산로35길 50-4, 도화동 1-402번지

다. 공사기간 : 2016. 11. 7. ~ 2016. 12. 26.

라. 공사내용 : 느티나무 등 28종 식재, 콘크리트블럭 포장 설치 등

마. 도 급 자 : ㈜에코밸리 대표 이재흥

바. 도 급 액 : 금73,480,000원

사. 설계변경 금액 : 증 5,810,000원

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감 액
총 공 사 비		73,480,000	79,290,000	증 5,810,000
도급비	공 급 가 액	66,800,000	72,081,819	증 5,281,819
	부가가치세	6,680,000	7,208,181	증 528,181
	소 계	73,480,000	79,290,000	증 5,810,000

아. 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원 확충, 도심공원확충, 경의선숲길 공원조성, 시설비(도시개발특별회계)

자. 설계변경사유 : 현장여건을 반영한 물량 변경

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서(방침서) 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김윤영		주무관	박미성		공원운영과장	代정언룡		서부공원녹지사업소장	12/22 오진완
협조자	주무관	조기환
시행	공원운영과-20917	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243 (성산동)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5545	/전송	02-300-5527	/	youn127@seoul.go.kr	/	부분공개(5)