문서번호	생산관리과-17639
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		생산관리과장		생산부장
신왕근		한희선		12/22 代한희선
협 조
	주무관				이상록
	주무관				임은비

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업』

2016년 세출예산 이월계획 보고

2016.  12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업』

2016년 세출예산 이월계획 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업” 과 관련한 2016년 세출예산을 이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

❍ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업

❍ 사업기간 : 2015.01.01. ~ 2017.06.30.

❍ 사 업 비 : 9,110백만원

❍ 사업내용 : - 농축조 2지 신설(D31) 및 기존 2지 재건설(D35)

- 노후 배출수처리시설 개량

Ⅱ		이월액 현황

❍ ’16년 예산별 이월 내역

- 시설비 : 920,760,320원                                    (단위 : 원)

구 분	지출원인행위액	지출(예정)액	이월액
계	5,500,947,100	4,580,186,780	920,760,320
토목·기계 공사	2,400,000,000	2,400,000,000	0
전기 공사	206,000,000	164,725,000	41,275,000
통신 공사	53,686,000	53,686,000	0
PHC파일 구매	254,705,000	254,705,000	0
아스팔트콘크리트 구매	52,136,570	0	52,136,570
이형봉강 구매	429,324,330	255,897,330	173,427,000
레미콘 구매	318,495,090	142,950,340	175,544,750
슬러지수집기 구매	922,690,000	461,000,000	461,690,000
슬러지이송펌프 구매	44,436,930	44,436,930	0
감시제어시스템 구매	398,621,180	398,621,180	0
전동기제어반 제작구매 설치	58,050,000	58,050,000	0
LED보안등 설치	13,817,000	13,817,000	0
CCTV설비 구매	89,176,000	89,176,000	0
폐기물처리용역	259,809,000	243,122,000	16,687,000

- 감리비 : 185,900,000원                                    (단위 : 원)

구 분	지출원인행위액	지출(예정)액	이월액
계	562,100,000	376,200,000	185,900,000
건설사업관리용역	562,100,000	376,200,000	185,900,000

Ⅲ		이월액 발생 사유

❍ 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사 중 서울숲관리사무소 등 유관기관과의 업무협의 지연, 지하장애물 추가 발생, PHC파일 자재 수급불균형으로 인한 자재공급 지연 등으로 인하여 토목·기계 공사의 준공기한을 2017.06.30.일까지 연기 하였음

❍ 이에 따라 토목·기계공사와 동시 또는 추후로 진행되는 공사

및 용역의 준공기간을 연기하고 준공기간에 맞추어 예산 이월

Ⅳ		행정 사항

❍ 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량사업 추진에 차질이 발생치 않도록  이월 대상액을 2017년 으로 이월 조치코자 함.

따로붙임 : 1. 이월사업별 명세서 1부.

2. 이월사업 명세표 1부. 끝.