“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-28766		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장		부구청장
			이현호	김종철		김근태		박은섭		12/22 주윤중
등록일자	2016.12.22.
결재일자	2016.12.22.
공개구분	부분공개
			협조자
					재무과장		代최성애
					계약팀장		박성희

- 2016/2017년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경 시행 계획[총차-1회, 1차-정산, 2차-1회]

▢ 2016년 제설대책 비상근무 현황

(2016.12. 22. 현재)

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황						비 고
	횟수	적설량	계	훈련	보강	1단계	2단계	3단계
‘16년 11월~12월	1회	0.07cm	4회	1회	2회	1회	-	-

▢ 설계변경사유

○ 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 반영

▢ 용역비 증ㆍ감 사항

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	377,457,980	377,457,980	-	249,912,700	249,912,700	-
1차	210,472,000	190,480,000	감)19,992,000	136,220,600	31,385,000	감)104,835,600
2차	166,985,980	186,977,980	증)19,992,000	113,692,100	218,527,700	증)104,835,600

▢ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(총차-1회, 1차-정산, 2차-1회)을 시행코자 함.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 증･감 사항 반영
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 예산확보 완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 강남구 구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 물량 증감사항에 대하여 설계변경 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2016/2017년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경 시행 계획[총차-1회, 1차-정산, 2차-1회]

2016년(11~12월) 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간을 반영하여 2016/2017년 區 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속)의 설계변경을 다음과 같이 시행코자 함.

1		강설 및 비상근무 현황

(2016.12.23. 현재)

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황						비 고
	횟수	적설량	계	훈련	보강	1단계	2단계	3단계
‘16년 11~12월	1회	0.07cm	4회	1회	2회	1회	-	-
‘15년 11~12월	12회	7.5cm	13회	1회	8회	3회	1회	-	참고 사항

2		용 역 개 요

용 역 명		2016/2017년 區 제설대책 민간위탁 용역	2016/2017년 洞 제설대책 민간위탁 용역
용역기간	총차	2016. 11. 7 ~ 2017. 3. 31	2016. 11. 8 ~ 2017. 3. 31
	1차	2016. 11. 7 ~ 2016. 12. 31	2016. 11. 8 ~ 2016. 12. 31
계약금액	총차	377,457,980원	249,912,700원
	1차	210,472,000원	136,220,600원
	2차	166,985,980원	113,692,100원
계 약 자		㈜우진중기 전효광	㈜상익공영 대료 노승희
예산과목		도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책, 민간이전, 민간위탁금

3		설계변경 내용

▢ 설계변경 사유 : 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 반영

▢ 주요공종 증ㆍ감 내역

○ 區 용역

공 종	단위	총차		1차		2차		비고
		당초	변경	당초	변경	당초	변경
15톤 덤프트럭(대기)	일	735	735	252	735	483	0
15톤 덤프트럭(가동)	시간	840	840	560	28	280	812
운전원(야간)	시간	520	520	260	161	260	359
작업원(야간)	시간	600	600	360	76	240	524
백호우(가동)	시간	360	360	240	0	120	360

○ 洞 용역

공 종	단위	총차		1차		2차		비고
		당초	변경	당초	변경	당초	변경
제설작업(주간-2.5톤)	시간	1,488	1,488	892	108	596	1,380
제설작업(야간-2.5톤)	시간	1,488	1,488	892	0	596	1,488
덤프트럭(대기)	시간	2,376	2,376	1,080	551	1,296	1,825
운전원(주간)	시간	1,188	1,188	540	220	648	968
작업원(주간)	시간	84	84	28	0	56	84

▢ 용역비 증ㆍ감 사항

(단위 : 원)

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	377,457,980	377,457,980	-	249,912,700	249,912,700	-
1차	210,472,000	190,480,000	감) 19,992,000	136,220,600	31,385,000	감) 104,835,600
2차	166,985,980	186,977,980	증) 19,992,000	113,692,100	218,527,700	증) 104,835,600

4		조 치 계 획

상기 보고내용과 같이 2016/2017년 區ㆍ洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속)에 대한 설계변경(총차-1회, 1차-정산, 2차-1회)을 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 각1부.

2. 제설대책 비상근무 발령 현황 1부.  끝.