문서번호	생태공원과-4140
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	12/22 문길동
협 조
	총무과장			박병현
	기획예산과장			김건태
	주무관			김대호

이촌지구 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토

한강사업본부

(생태공원과)

이촌지구 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토

우리본부에서 추진 중인 ｢이촌지구 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 한강시민위원회 자문 검토 및 하천점용허가 신청 등의 사유로 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○  용 역 명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계

○  위    치 : 이촌한강공원(한강대교~동작대교 북단)

○  설계내용 : 연장 2.1㎞

- 하안구조 개선, 수변식생대 조성, 자전거도로·산책로 대체 검토, 생물서식처 및 생태복원구간 조성 등

○ 용역기간 : 2016. 5. 3.~2016.12.30.

○ 용 역 비 : 252,223,700원

○ 용역기관 : ㈜삼안, ㈜동해종합기술공사

준공기한 연장

○ 용역기간 : 80일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비 고
당 초	2016. 5. 3. ~ 12. 30.	변동없음
변 경	2016. 5. 3. ~ 2017. 3. 20.

○ 연장사유

- 설계경제성(VE), 한강시민위원회, 용역최종보고 자문(심의)내용 검토 반영 및 과업기간 연장 조정 의견 수용

- 용역내용 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 신청, 보완에 따른 협의기간 소요

귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

검토의견

○ 설계경제성(VE) 심의 및 한강시민위원회 본회의와 설계최종보고 자문내용 반영여부 검토와 세부사항 설계 반영을 위해 과업기간 연장 조정 필요하고,

○ 설계용역 내용 서울지방국토관리청 하천점용허가와 소규모환경영향평가 신청에 따른 업무협의, 설계보완 등의 기간이 필요한 바,

○ 상기와 같이 기본 및 실시설계용역 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.  끝.