함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보 [뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(CM)용역]

1. 시설과-10952(2016.12.19.)호와 관련입니다.

2. 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리 용역 (8차분)』에 대한 변경계약을 체결하고 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 자 :***********************)

나. 용역개요

- *******************

- ****************

- ********************

다. 계약기간

- 총 차 분 : 2009.05.22. ∼2016.12.31.

- 8차분(금회) : 2016.04.15. ∼2016.12.31.

라. 변경계약 현황

(단위:천원)

구분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
총차분	‘09.5.22. ∼ ’16.12.31.	6,626,170	‘09.5.22. ∼ ’17.06.30.	6,660,350	증34,180
8차분	‘16.04.15.∼ ’16.12.31.	643,000	‘14.04.15.∼ ’17.01.11.	변경없음	8차(1회) 변경

마. 변경사유 : 감리원 투입계획 조정과 증액에 따른 변경

붙임 : 1. 변경계약 합의서 1부.

2. 변경계약 보고서 1부.

3. 변경계약 의뢰 관련 공문. 끝.

	재무회계과장
주무관	김경식		재무회계과장	12/22 박병식
협조자
시행	재무회계과-18348	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)