투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	잠실주경기장 비상발전기 교체 전기공사외 3건 준공계(납품검사원) 접수 등 알림

1. 잠실주경기장 비상발전기 교체사업과 관련입니다.

2. “잠실주경기장 비상발전기 교체 전기공사”외 3건 사업이 완료됨에 따라 준공계 (납품검사원)가 공사감리업체에 접수되어 아래와 같이 준공검사 실시예정임을 알려드립니다.

가. 공사 준공현황

구 분	잠실주경기장 비상발전기 교체 전기공사	잠실주경기장 비상발전기 제작구매 설치	잠실주경기장 CTTS PANEL 제작구매 설치	잠실주경기장 원격제어설비 제작설치
계약 금액	₩23,815,000	₩380,000,000	₩57,999,700	₩23,188,000
계약년월일	2016. 09. 30	2016. 09. 13	2016. 10. 12	2016. 09. 29
착 공 일	2016. 10. 04	2016. 09. 13	2016. 10. 12	2016. 09. 29
준공 기한	2016. 12. 23	2016. 12. 23	2016. 12. 23	2016. 12. 23
준 공 일	2016. 12. 21	2016. 12. 21	2016. 12. 21	2016. 12. 21
계 약 자	세현전력(주)	보국전기공업(주)	(주)리젠코	(주)리젠코

나. 준공검사 실시 계획

∘ 검사자 : (주)극동문화전기설계 비상주감리원 정석주

∘ 검사일 : 2016년 12월 22일(14:00 ~   )

∘ 입회자 : 책임감리원 김경용

붙임 : 1. 관련공문 1부

2. 준공계(납품검사원) 4건. 끝

	시설개선과장
주무관	박관현		시설개선과장	12/22 최용덕
협조자
시행	시설개선과-14107	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8868	/전송	02-2240-8777	/	pkh2000@seoul.go.kr	/	대시민공개