문서번호	도시철도토목부-16159
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	토목2과장		도시철도토목부장
한재호	문병종	방영복		12/22 김진팔
협 조

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

총괄분 준공기한 연장 검토 보고

2016. 12

서울특별시 도시기반시설본부

도시철도토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

총괄분 준공기한 연장 검토 보고

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』와 관련 책임감리원으로부터 총괄공사에 대한 준공기한 연장 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

※ 벽산엔지니어링(주) 벽산(엔)(2016...)

1		사업개요

□ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

□ 공사개요 : 연장 1,390m(본선터널 934m, 본선개착 291m, 정거장 1개소 165m)

□ 공 사 비 : 156.190백만원

□ 계약기간 : `09.12.31 ~ `16.12.31

□ 시공회사 : 롯데건설(주) 외 1개사

□ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주) 외 3개사

3		보고내용

□ 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공 사 비	156,190	156,190	변경없음
총 괄 계약기간	`16.06.16~`16.12.31	`16.06.16~`18.12.31	증) 24개월

※ 롯건서지현 제2016-636호(2016.12.21.) : 『총괄 6회 계약변경(기간연장) 요청』

- 예정공정표상 공사완료 시기 : 2018.03.31

□ 변경사유

○ 국토교통부고시 제2016-713호 9호선 기본계획 변경 승인

- 사업기간 변경 : [당초]2001년~2015년 ⇒ [변경]2001년~2018년

4		책임감리원 검토의견

□ 3단계 기본계획 변경(사업기간 변경)에 의한 총괄분 공사기간을 2018.12.31.까지로 연기되어

□ 시공자로부터 제출된 예정공정표상 공사완료 시기는 2018.03.31이나

□ 공사완료 후 종합시운전·준공대비 현장관리 및 시설물 인계인수 등을 감안하여 총괄분 계약기간을 2018.12.31.까지 연기하는 것이 적절하다고 판단됨.

5		조치계획

□ 책임감리원 검토의견과 같이 총괄분 계약기간을 조정하여 설계변경 처리하고, 조속히 9차공사 발주를 통해 원활한 공정관리를 추진하고자 함.

붙 임 : 감리검토 의견서 1부. 끝.