투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(최종) 계약의뢰(2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사-연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) 』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 4 .7 ~ 2016. 12. 31.(변경없음)

다. 계약금액 : 636,823,000원

라. 도 급 자 : ************

마. 설계변경사유

- 불량맨홀 시공물량 증감 및 맨홀정기점검 추가조사 물량 반영

바. 설계변경내역

- 공사비 변경                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	641,829,500	665,368,000	증) 23,538,500
도 급 비	636,823,000	665,368,000	증) 28,545,000
이 설 비	5,006,500	-	감) 5,006,500

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비(품의번호 11)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 자료 1부.

4. 설계변경 시행 방침. 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김용면		도로보수과장	12/22 이상호
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로보수과-6544	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	부분공개(5)