문서번호	시설관리과-36198
결재일자	2016.12.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		강동철	12/22 천성훈
협조

설계변경 시행 심의결과 보고

(2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물 처리용역(장기계속단가)-2차-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 관내 「2016년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물처리용역(장기계속단가)-2차」설계변경(최종)과 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12.

보고자 직급 : 지방시설주사보  성명 : 박행종

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 2016년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장

건설폐기물 처리용역(장기계속단가)2차-설계변경(최종)

나. 용역개요 : 폐기물운반 681㎥,  폐기물 처리 1,590ton

다. 용역기간 : 2016. 11. 08 ~ 2016. 12. 31

라. 총용역비 : 금40,094,000원

마. 수 급 자 : 동부이엔티㈜  대표 허진원

바. 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처 서홍석

2. 설계변경 심의결과 : 적정함.(붙임문서 참조)

가. 심의일시 : 2016.12.22.(목) 11:00

나. 장    소 : 2층 회의실

다. 심의내용 : 설계변경 타당성, 적정성, 등

3. 보고내용

가. 설계변경(최종) 사유

- 현장 상태에 따른 계약물량 증·감 및 신규공종으로 설계변경 사유 발생

- 총부기금액 : 당초 40,094,125원, 변경 40,094,000원(감125원)

나. 검토근거 : 공사계약 일반조건(현장 상태에 따른 설계변경)

다. 계약물량 변경내역

구분	당초 물량(㎥)			변경 물량(㎥)			비고
	계	1차수	2차수	계	1차수	2차수
계	696.0	556.4	139.6	681.0	681.0	0
폐아스콘	658.0	526.4	131.6	499.0	499.0	0
폐콘크리트	25.0	20.0	5.0	182.0	182.0	0
폐토사	15.0	12.0	3.0	0	0	0

라. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경내역

구분	당 초	변 경	증 감	비고
계(총차수)	40,094,125원	40,094,000원	감125원
1차수	32,075,300원	40,094,000원	증8,018,700원
2차수	8,018,825원	- 원	감8,018,825원

4. 조치의견

- 상기와 같이 계약물량 증․감 및 신규공종이 발생하여 붙임문서와 같이 설계변경과 차수별 계약금액 변경을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.