함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경시행(상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역)

우리 본부에서 시행중인 「상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액 변경을  시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역

2. 용역개요

가. 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체,포장등) : 17,694건

나. 누수복구 분야(누수복구,포장,공사장 입회 등) : 16,752건

다. 시설물 분야(노후밸브교체,배수지,시설물 등) : 3,145건

3. 용역기간 : 전체분 2015. 6. 22.~2017. 6. 21. (2차분 2016. 1. 1.~12. 31.(금회))

4. 소요예산 : 전체분 4,293,820,000원

5. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비,감리비

상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(누수,불용관 감리비)

구축물,시설비및부대비,감리비(시설물)

6. 계 약 자 : ㈜이준엔지니어링 대표 나석근 등 2개사

7. 설계변경 내역

가. 전체분 : 4,293,820,000원 (변경없음)

나. 2차분  : 2,075,315,000원 (감 105,765,000원)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총부기 금액	4,293,820,000	4,293,820,000	-
1차 금액	1,077,395,000	1,077,395,000	-
2차 금액	2,181,080,000	2,075,315,000	감 105,765,000원
3차 금액	1,035,345,000	1,141,110,000	증 105,765,000원

8. 변경사유 : 2차분 근무일수 증감에 따른 차수별 금액 변경

붙임 : 1. 설계변경 소위원회 결과보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의위원회 의결서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

주무관							노경철				누수방지과장					김영삼					시설안전부장					강신재					경영관리부장						12/22 정진일
협조자				주무관							김경식					급수설비과장							김기상
시행			누수방지과-12473										(						)		접수												(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 시설안전부																/
전화		3146-1520							/전송			3146-1529					/	shrudcjf07@seoul.go.kr													/	부분공개(6)