함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	뚝도정수센터 농축조공사 관급자재 이형봉강 납품기한 연기 요청

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 이형봉강 구매 계약”과 관련하여 아래와 같이 변경 계약코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 내용 : 납품기한 연기

계약건명	계약업체	계약금액 (원)	납품기한
			당초	변경
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 이형봉강 구매	현대제철(주) 대표자 우유철	429,324,330	’16.03.29. ~’16.12.30.	’16.03.29. ~’17.03.30.

나. 연기사유 귀책 소재 : 업체에 해당없음

다. 납품기한 연기 사유

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간 연기 〔당초: ’15.11.27~’16.08.31 → 변경: ’15.11.27~’17.06.30〕에 따른 관급자재 사용시기 미도래

따로붙임 : 납품기한 연기 방침서 1부. 끝.

	생산관리과장
주무관	신왕근		생산관리과장	12/23 한희선
협조자
시행	생산관리과-17666	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개