함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행 중인 「독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사」 에 대하여 설계변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요┎ 당초 D=20~300㎜  L=2,876m

┖ 변경 D=20~300㎜  L=2,783m

다. 공사기간 : 2016.5.4.~2016.12.27.

라. 계 약 자 : (주)예스코서비스 대표 정성찬

마. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총공사비	1,840,312,110	1,840,312,110	0
도급비	720,032,110	668,107,000	감 51,925,110
관급자재비	320,280,000	253,260,000	감 67,020,000
복구비및기타	800,000,000	918,945,110	증118,945,110

바. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증.감 및 신규 공종 발생

사. 예산과목

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(노후상수도관(배급수관)정비)

붙임  1. 설계변경 심의 결과보고 1부

2. 설계변경 사전 심의 요청서 1부

3. 설계변경 심의 의견서(스캔)  1부

4. 설계변경 내역서 1부

5. 합의서 1부.  끝.

★주무관	최선보		주무관	심숭금		주무관	강동길		남부수도사업소장	12/23 전영석
협조자	주무관	정헌석		행정지원과장	이두영		계약2팀장	양주춘
시행	급수운영과-30136	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	부분공개(5)