문서번호	정보통신보안담당관-25737
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	정보통신기획팀장	정보통신보안담당관		정보기획관
김남학	이방우	박웅수		12/23 최영훈
협 조

공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

2016. 12.

정 보 기 획 관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

서민, 소외계층 등 시민이나 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있는

무선인터넷 구축사업 완료에 따른 현장 설치상태, 장비기능, 과업지시서 등에 대한 검수를 실시한바, 이상없이 적합하게 설치되어 보고 함.

Ⅰ		관련근거

민선6기 60대 주요공약 (버스에서도 터진다! 서울 전역 와이파이존 구축)

공공 무선인터넷(WiFi) 구축계획 (정보통신보안담당관-14772/’16. 7.20)

공공 무선인터넷(WiFi) 구축 시행 (정보통신보안담당관-13879/’16. 8.05)

Ⅱ		추 진 경 과

현장실사 및 작업계획 수립       :   ’16. 9.14 ～ 10. 9

장비, 공사자재 등 반입          :   ’16. 9.19 ～ 10.31

자치구․이동통신사 망구성       :   ’16. 9.20 ～ 11. 8

장비 설치 및 시설공사           :   ’16.10.11 ～ 12. 6

이동통신사 AP 설치 및 개통     :   ’16.11. 1 ～ 12.13

AP 설치위치 좌표 조사          :   ’16.11.14 ～ 12.14

AP운영상태 점검 및 납품검사     :   ’16.12.15 ～ 12.22

Ⅲ		사 업 개 요

건     명 : 공공 무선인터넷(WiFi) 구축

주요과업

공공무선인터넷 설치 – 989AP (자가망 486, 이통망 503)

- u-무선망 연계, 자치구 통신환경 고려한 무선 인프라 구성

- LAN 및 광케이블 포설, 전원공사, 통신함체 등 설치

- 이동통신사 AP 설치

계약금액 : 592,774,400원

계약업체 : 한라정보통신㈜

기    간 : 2016. 9. 13 ~ 12. 15

Ⅲ		세부시설내역

설치수량  : 440지역 989AP

(단위 : 지역/AP)

구 분	계		자가통신망		이동통신사망
계	440/	989	297/	486	143/	503
주요거리	128/	239	116/	224	12/	15
전통시장	20/	51	15/	30	5/	21
버스정거장	13/	29	13/	29
공 원	145/	176	143/	174	2/	2
공공시설	73/	241			73/	241
문화․관광	61/	253	10/	29	51/	224

※ 설치장소 : 붙임1 참조

시설내역

구분	품 명	규 격	단위	수량
통신 장비	스위치(24포트)	20-port 100, 콤보타입 4-port 1GBase-X	EA	1
	POE스위치(24)	Fixed 24-port 100/1000Base-T with POE	EA	1
	광송수신기	1000BASE-X SFP(M/M)	EA	2
	산업용스위치	1000 Base-X 2포트, 10/100TX 8포트	EA	262
	광송수신기	1000BASE-LX SFP, 산업용스위치용	EA	425
	광송수신기	1000BASE-X WDM용 SFP, 산업용스위치용	EA	104
	ONT	이더넷방식 1포트 이상	EA	42
	L3	24 PORT 1GBE COMBO (rj45, sfp)	EA	2
	광송수신기(L3)	1000BASE-LX SFP	EA	1
	함체	300×300×400, 옥외형, 방수	EA	25
	광분배기	스플리터, 1:2	EA	42
	POE 인젝터	802.3at	EA	228
	엠블럼제작	벽면부착 1,000장, 안내판용 1,000장	식	1
	XY좌표추출 및 도면작성	900AP 등록, 앰블럼부착	식	1
	무선통합관제	데쉬보드(SPLEX, 청계청사 추가)	식	1
	웹인증장비	OS별 접근차단(SPLEX, 청계청사 추가)	식	1

구 분	품 명	규 격	단위	수량
시설 공사	엑세스포인트 설치	802.11a/g/n 내장형	EA	8
	금속가요전선관(방수형)	22mm	M	1,968
	금속가요전선관 콘넥타	22mm	EA	1,332
	UTP 전선	CAT5e 4P	M	6,019
	광케이블	SM12C	M	370
	전원케이블	F-CV 2.5mm 3C	M	1,232
	FDF	12CH	EA	6
	광점퍼코드	SC-LC, 3M	EA	671
	광점퍼코드	SC-SC, 3M	EA	46
	광점퍼코드	SC-LC, 20M	EA	10
	광케이블 성단	SM	코어	1,157
	광케이블 접속	SM	코아	2,628
	광케이블 시험	종합시험, OTDR 측정	코아	754
	광 피그테일	1M	EA	769
	누전차단기	220V-단상(30AF이하)	EA	25
	전원콘센트	220V-노출(접지형)	EA	362
	RJ45	AMP	EA	1,468
	RJ45 보호캡	일반형	EA	1,468

붙 임 : 1. AP 설치현황 1부.

2. AP 설치 및 운영상태 점검 1부.

3. 계약내역 1부.

4. 검수내역 1부.

5. 검수사진 1부.

6. 설치도면(별도붙임) 1부.

7. 준공도서(별도붙임) 1부.  끝.