문서번호	급수운영과-30087
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/23 최철민
협 조

설계변경 심의 결과 보고

[독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사]

2016. 12.

남부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의 결과 보고

[독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사]

「독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사」 에 대하여 다음과 같이 설계변경  심의위원회 심의를 마치고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

공사개요

- 당 초 : D=20~300㎜  L=2,876m

- 변 경 : D=20~300㎜  L=2,783m

공사기간 : 2016.5.4. ~ 2016.12.27.

도 급 액

- 당 초 : 금720,032,110원

- 변 경 : 금668,107,000원

계 약 자 : (주)예스코서비스 대표 정성찬

Ⅱ		설계변경 심의위원회 개최

일  시 : 2016년12월23일(금) 10:00

장  소 : 3층 급수운영과 사무실

위원장 : 급수운영과장 최철민

위  원 : 시설관리과 주무관 고신석, 강동철, 김대성

간  사 : 급수운영과 주무관 강동길

Ⅲ		설계변경 위원회 검토 내용

설계변경 타당성 : 타당함

신규공종 및 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

제잡비 적정 산정 및 적용 적성성 : 적정

각종 제반규정 준수여부 : 준수

Ⅳ		설계변경 세부 내역

주요 물량 증ㆍ감 내역

공 종	규 격	수 량		금 액
		당초	변경
콘크리트포장절단-주간	100~150㎜,지세	96	1,908	4,785,492
저소음아스팔트포장절단-주간	T=15Cm,지세	1235	972	-509,168
저소음콘크리트포장절단-주간	T=15Cm,지세	877	-	-4,328,872
콘크리트포장깨기-주간	굴삭기(타이어) 0.18㎥(브),지세	159	388	7,719,590
터파기(기계100%)불량-주간	굴삭기(타이어) 0.18㎥	1657	1344	-2,669,577
잔토소운반(0.18터파기동시상차)-주간	4.5DT,(현장->집하장3km)	204	388	-2,527,155
저소음아스팔트포장절단-야간	T=15Cm(야간＋지세)	759	-	-2,213,244
주철직관 부설공-주간	150㎜,지세	1381	1093	-2,511,936
주철이형관 부설공-주간	150㎜,지세	377	192	-2,904,500
주철관 철거공-주간	150㎜,지세	800	330	-2,049,200
KP이탈방지압륜 접합-주간	150㎜,지세	489	259	-3,625,720
주철관절단공-주간	80㎜,지세	70	130	1,670,940
주철직관 부설공-야간	150㎜,(야간＋지세)	24	168	2,375,568
KP이탈방지압륜 접합-야간	300㎜,(야간＋지세)	260	172	-5,550,336
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=80mm,지세	18	8	-3,071,300
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm,지세	20	10	-3,109,570
가설급수장치 본관 설치및철거	100m기준	19	12	-1,420,461
가설급수장치 인입관 설치및철거	13mm	161	41	-3,645,720
교통정리원	야간	22	40	2,199,060
철개고정장치	높이조절용(흄관용)	34	53	4,264,949
부지임대료				-2,558,838

신규공종 내역

공 종	규 격	수 량		금 액
		당초	변경
인력터파기(용수,협소)-주간	견질토사0-1,지세	-	13	456,365
되메우기-주간	인력-지세	-	15	141,135
콘크리트 포장절단-야간	100~150㎜,(야간＋지세)	-	335	1,213,035
콘크리트 포장깨기-야간	굴삭기(타이어) 0.18㎥(브),(야간+지세)	-	58	1,955,180
가설급수장치 인입관 설치 및 철거	20mm	-	36	1,480,356
가설급수장치 인입관 설치 및 철거	25mm	-	20	1,111,840

신규 사급자재 내역

공 종	규 격	수 량		금 액
		당초	변경
이경티이(슬립인죠인트)	50/25	-	1	51,253
새들,주철관용(슬립)	100/50	-	2	349,274
새들,주철관용(슬립)	200/25	-	3	253,601
새들,주철관용(슬립)	250/25	-	1	90,267
새들,주철관용(슬립)	300/50	-	2	418,219
청동 게이트밸브(10㎏)	D=50㎜	-	1	50,763
앵글밸브	D=13㎜	-	2	20,766
새들분수전 캡	D=25㎜	-	5	23,703

계약금액 변경 내역

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공사비 합계	446,457,924	437,389,373	-9,068,551
간접노무비	31,931,900	29,415,463	-2,516,437
산재보험료	11,857,378	10,922,942	-934,436
고용보험료	2,714,715	2,500,778	-213,937
건강보험료	5,515,701	-	-5,515,701
노인장기요양보험료	361,278	-	-361,278
연금보험료	8,078,880	-	-8,078,880
퇴직공제부금	6,442,400	1,663,000	-4,779,400
산업안전보건관리비	16,360,027	12,794,990	-3,565,037
기타경비	25,402,823	24,566,791	-836,032
건설하도급발급수수료	361,630	-	-361,630
건설기계대여대금	2,187,643	-	-2,187,643
순공사비	557,672,299	519,253,337	-38,418,962
일반관리비	30,671,976	28,558,933	-2,113,043
이 윤	72,520,576	64,811,622	-7,708,954
제요율제외공종	-6,290,206	-5,253,892	1,036,314
공급가액	654,574,645	607,370,000	-47,204,645
부가가치세	65,457,465	60,737,000	-4,720,465
도 급 비	720,032,110	668,107,000	-51,925,110

Ⅴ		처리의견

본 공사는 공사시행에 따른 신규공종과 신규사급자재 및 물량 증ㆍ감이

발생한 사항으로 자체 설계변경 심의 결과 적정한 것으로 심의 완료되어,

변경 계약의뢰하여 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 사전 심의 요청서 1부

2. 심의 의견서 사본 1부

3. 설계변경내역서 1부.  끝.