문서번호	총무과-15742
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장
김현철	황차호	12/26 권영섭
협 조

「서울시립경희궁미술관 철거공사」

문화재위원 현장 자문 결과 보고

2016. 12

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「서울시립경희궁미술관 철거공사」문화재위원 현장자문 결과 보고

서울시립경희궁미술관 철거공사와 관련하여 서울시 문화재위원회의 심의조건 사항에 따른 문화재위원의 현장 자문을 실시하고 그결과를 보고함

1		추진근거

□ 서울시립경희궁미술관 철거 문화재 심의 통보(역사문화재-2875-, ‘16. 10. 06)

□ 서울시립경희궁미술관 철거공사 문화재위원 현장자문 계획(총무과--15397 ‘16. 12. 16)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시립경희궁미술관 철거공사

□ 위    치 : 서울특별시 종로구 신문로 2가 2-1 경희궁지 내

□ 공사내용

○ 가설공사

- 가설휀스, 가설사무실 및 공사안내판 등 설치

○ 철거공사

- 건축

· 막구조 천막 철거, 철골재 철거

· 가벽철거, 철근콘크리트 벽, 슬라브 철거

· 창호 및 석면 철거

- 전기설비(고전압기계, 분전반 철거, 형광등 철거)

- 소방설비(소방용수물탱크, 소화기보관함 철거 및 소화전 철거)

- 기계(에어컨 철거. 에어컨 실외기 철거, CCTV 철거)

- 위생기구(정화조, 좌변기, 소변기, 세면대 철거)

○ 부대공사

- 철거 후 부지정리 및 잔디 띠 식재

□ 감 리 원 : ㈜한인전통건축감리단

□ 시 공 사 : ㈜창의건설

□ 공 사 비 : 110,477천원

□ 공사기간 : 2016. 11. 11 ~ 2016. 12. 30.

3		자문개요

□ 내 용 : 서울시립경희궁미술관 철거공사 현장 콘크리트 기초 철거 현장 입회

□ 일 시 : 2016. 12. 22(목) 12:00

□ 장  소 : 서울시립경희궁미술관 철거공사 현장

□ 문화재위원 : 서울시립대학교 건축학부 이강근 교수

철거현장 전경	자문대상 기초단면 상태 확인
기초하부 기반층 상태 확인	자문대상 기초샘플 파쇄

4		자문결과

□ 철거대상 건물이 지어질 당시 구 서울고등학교 건물 철거폐기물로 매립하여 성토하고 그 위에 진흙층과 마사토층을 깐 뒤 콘크리트 매트 기법으로 바닥을 만들고 나서 구조물을 세운 것으로 판단됨

□ 따라서 본 철거공사로 유구가 훼손될 가능성은 아주 작아 보이나 한 지점만 확인하였으므로 중장비로 과도하게 지하층을 건드릴 경우 유구가 훼손될 가능성이 있으므로 현장소장, 감리 등은 유의하여 철저히 감독할 필요가 있음

□ 콘크리트 기초부를 모두 철거한 뒤, 사적지 내부임을 감안하여 철거후 부지마감에 대한 설계안을 제출하여 문화재위원회의 심의를 받을 것

5		향후계획

□  문화재위원회 개최일(‘17. 1월 말 예정) 및 철거공사 준공기한(‘16. 12. 30) 도래를 감안하여 공사 계속진행 여부 결정

□ 문화재위원회 심의 결과에 따라 부지정리 공사 시행

□ 공사완료 및 폐기물처리 및 감리용역 준공

6		행정사항

□ 문화재위원 자문의견을 반영하여 수리하도록 감리자 및 시공자에 지시

□ 자문 수수료 지급

○ 자문비용 : 금200,000원(금이십만원)

○ 지급대상 : 이강근 문화재위원

- 예산과묙 : 시립미술관 총무과, 행정운영경비(시립미술관 총무과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

○ 지급방법 : 자문 수수료를 문화재위원 명의의 계좌로 이체

□ 문화재 심의 상정 요청(미술관 → 역사문화재과)

붙 임 :  자문 의견서 1부.