문서번호	공보실-4850
결재일자	2016.12.26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	영상미디어팀장	공보실장
최정은	이창우	12/26 임출빈
협 조

서울시의회 영상자료

디지털 변환 및 아카이브시스템 구축 검수 보고

2016. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울시의회 영상자료

디지털 변환 및 아카이브시스템 구축 검수 보고

서울시의회 영상자료 디지털 변환 및 아카이브시스템 구축 사업이 완료됨에 따라 산출물에 대한 (검수)를 실시하고 그 결과를 보고함

사업 개요

○ 사 업 명 : 서울시의회 영상자료 디지털변환 및 아카이브시스템 구축

○ 추진근거 :『서울시의회 영상자료 디지털 변환 및 아카이브시스템 구축 계획』

(의장방침 제93호, ′16.3.15.) 및 (공보실983, 2016.3.16.)

○ 사업기간 : 2016.06.17 ~ 2016.12.31

○ 계약금액 : 금754,000,000원

○ 계 약 자 : ㈜글로벌텔레콤

○ 사업내용

- 디지털 아카이브 시스템 도입

· one-stop 미디어 업로드 및 관리를 위한 운영 시스템 구축

· 사용자 편의 및 보안강화를 위한 시스템 구축

· 아카이브 관리 시스템 운영 장비 도입 및 설치

· 제작 환경 개선을 위한 NLE Plug-in 및 MAM 웹 브라우저 도입

· 인제스트, 트랜스코더, 카탈로그, 트렌스퍼메니저 등 시스템 도입

- 의정활동 역사기록물 효율적 보관 및 활용

· 영상자료 디지털 변환 및 사진자료관 사진자료 통합 관리․운영

· 외부 환경 변화에 따른 자료의 손상을 막고 영상자료의 체계적 관리 및 기록 보존

- 영상물 검색 및 다운로드 편의성 제공

· 효율적인 콘텐츠 관리 시스템 구축을 통한 영상물 활용 편리성 확보

및 업무환경 개선

중간검수

○ 검수기간 : 2016.9.28. ~ 2016.10.5.

○ 검수자 : 영상미디어팀장(총괄), 최정은, 김정한, 구본중

○ 검수대상

- 시스템 인프라 구축

· 구축일정 : 스토리지·서버·네트워크 입고               : ’16.8.8

스토리지·서버·네트워크 랙 설치            : ’16.8.16

네트워크 공사 완료                        : ’16.8.22

MAM 인프라 설치 완료                        : ’16.9

○ 검수결과 : 100% 납품확인

○ 검수방법 : 실물과 납품내역 비교 검수

○ 하드웨어(H/W) 내역

구 분	도입내역	모델명	수량	설치결과
MAM & DB 서버	MAM 및 DB 운영 서버, 이중화 구성	HP DL380 Gen9	2	○
Transcoding 서버	GPU 기반의 고성능 트랜스코딩 서버	ED1304RPM v4	2	○
Catalog, TM 서버	카탈로깅과 전송을 위한 서버	HP DL380 Gen9	2	○
스토리지	· Usable 300TB 용량의 고성능 스토리지 · Main과 Backup 구성	Nextor 724 (AN-724F)	2	○
NAS Gateway	FTP/IIS/SMB3.0/NFS/ iSCSI 지원	NEXTOR NS812	2	○
ATTO 10G HBA	ATTO NS11 10G NIC for MAC, Linux, Windows	ATTO NS11 10G NIC	5	○
네트워크 스위치	1G 네트워크 스위치	Dell N3024	1	○
고성능 네트워크 스위치	10G 네트워크 스위치	DELL N4032F	1	○
인제스트 시스템	인제스트용 워크스테이션	HP Z840	1	○
웹스트리밍 서버	웹 스트리밍용 서버	HP DL380 Gen9	1	○
KVM	19" Rail Rack Monitor / Keyboard / Mouse KVM		1	○

○ 소프트웨어(S/W) 내역

구 분	도입내역	모델명	수량	설치결과
MAM 솔루션	MAM 및 DB 운영 서버, 이중화 구성	Ariel™ MAM S/W	2	○
DBMS	DB 솔루션	PostgreSQL 9.4	2	○
이중화 솔루션	서버간의 이중화 및 데이터 복제 지원	Lifekeeper	1	○
트랜스코더 솔루션	고해상도 파일의 저해상도 변환	Ariel™ GPU Transcoder S/W	2	○
카탈로그 솔루션	저해상도 파일 생성 후 실시간 카탈로깅	Ariel™ Catalog S/W	2	○
전송솔루션	· 미디어 파일 전송솔루션 · 표준프로토콜 지원, 전송 현황 및 결과 통보	Ariel™ Transfer Manager S/W	2	○
NLE Plug-in S/W	NLE용 MAM S/W	Ariel™ NLE PI S/W	1	○
검색엔진	MAM 검색을 위한 솔루션	GMSearch v2.5 Software	2	○
파일인제스트	영상, 이미지, 오디오, 사진, 문서 등의 등록	Ariel™ Filer	1	○
인제스트	인제스트 솔루션	Ariel™ VS2 (2CH)	1	○
스트리밍 S/W	Media Streaming S/W 웹스트리밍	WOWZA	1	○

※ 소프트웨어 산출물 〔붙임1〕 첨부

○ 서울시의회 본관 전산실 서버 Rack 실장도

최종검수

○ 검수기간 : 2016.12.15 ~ 2016.12.23.

○ 검사자 : 영상미디어팀장(총괄), 최정은, 김정한, 구본중

○ 검수대상

- 솔루션 구축 및 개발 및 기존 자료 디지털 변환

· 구축일정 : 솔루션 개발 요구사항 회의 진행               : ’16.7.

솔루션 도입 및 사진자료 이관         : ’16.7. ~ 10.

영상자료 변환 및 정보 입력          : ’16.7. ~’17.1.

사용자 편의를 위한 솔루션 가능 추가개발 : ’16.10. ~12.

○ 검수결과 : 정상 설치 및 개발 완료

○ 검수방법 : 영상 및 사진 담당자가 전체 메뉴별 테스트 확인

○ MAM 구축

- 솔루션 설치 및 개발 사항

구 분	내 역	확인결과
MAM 구축	· MAM솔루션 · DBMS(PostgreSQL) · 이중화솔루션 · Transter Manager · 트랜스코더/카달로거 · 검색엔진 · NLE Plug-in · 인제스트/파일인제스트	○
Metadata	· 시스템 메타 정의 : 동영상, 이미지 · 사용자 정의 콘텐츠 : Master, Clean, 촬영본, 이미지 · 메타데이타 정의 - 동영상 : 제목, 의원명, 촬영일 등 (14개 항목) - 이미지 : 제목, 의원명, 원화구분 (디지털/필름) 등 (15개 항목)	○
SNS연계	SNS 연계 서비스는 기능제약 사항(사용자별 휴대폰 인증 및 2개월 단위 재인증)이 있어 아래의 내용으로 변경 · 서버에서의 등록이 아닌 사용자 공유하기 기능 · 아카이브 시스템에서 영상 및 사진 다운로드 후 사용자 등록 기능	○
이미지 변환	이미지 자료 마이그레이션	○
DB이중화	MAM 및 DB 운영 서버, 이중화 구성	○
영상변환 시스템	영상변환을 위한 MAM설치 및 지원	○
추가 개발	검수 기능	○
	타임코드 기반 메타데이터 연계,구간정보 및 의원 입력 기능	○
	그룹 사진에서 개별 삭제 기능	○
	대표 사진 변경 기능	○
	영상 메타데이터 정의	○
	사진 메타데이터 정의	○
	인화 요청 기능	○
	공개/비공개 필드 사용자화	○
	의원 필드 사용자화	○
	영상/사진 분리 조회	○
	메타데이터 연계 API	○
	사용자 목록 임포트/다운로드	○
	SNS 연동 기능	○
	통계 사용자화	○

○ 매체별 영상변환 내역

- 영상물 보유현황

	제3대	제4대	제5대	제6대	제7대	제8대	제9대	수량(개)
총계								336,856
본회의DVD	350	353	300	2				1,005
행사DVD	108	127	216			89		540
DVC PRO 66분				309	582	158		1,049
DVC PRO 126분					168	183		351
6mm 테입					533	1,084		1,617
1TB(외장하드)						7	12	19
광디스크						11	70	81
사진자료	332,194							332,194

- 제3대~9대 영상자료 변환

· 본회의 및 행사영상 (3,045개): 변환 완료

· 촬영 원본 6mm tape (1,617개) : 2017년 1월 31일까지 변환 완료 예정

·사진 자료(332,194개) : 포토갤러리에 있는 사진 파일 이관 완료

※ 2016년 12월 23일 기준 영상변환 진행율 94%

(기존에 제시한 영상 지료 변환 완료, 촬영 원본 인제스트가 테잎 추가)

활용방안

○ 콘텐츠 다운로드를 통한 개별자료 확보 편리

- 검색을 통한 개인별 의정활동 자료 다운로드 기능

○ 영상물 및 사진자료 관리의 체계적 및 일관성 있는 업무기반 마련

○ 「2016년 의원 교육연수활동 지원 계획(의정담당관 1773, 2016.2.22.)」에 따라       2017년도 교육 실시 예정

향후계획

○ 준공에 따른 대가지급                    :  ’16.12.26 ~ 12.31

○ 도메인주소 등록                         :  ’16.12.26 ~ 12.31

○ 12월 이내 사업 마무리 후 상세 검수 및 가동기간 필요        :  ’16.1.~2.

○ 아카이브 시스템 오픈 후 상임위별 사용 매뉴얼 발송 예정  :  ’16.2. ~ 3

붙임1 : 산출물 리스트 1부.  끝

[붙임1]

산출물 리스트

○ 소프트웨어 산출물

No.	산출물명	문서번호	비고
1	요구사항정의서	SMC-DE-CM-001-요구사항정의서
2	프로그램 명세서	SMC-DE-CM-002-프로그램명세서
3	화면정의서	SMC-DE-CM-003-화면정의서
4	메타정의서	SMC-DE-CM-004-메타정의서
5	인터페이스 명세서	SMC-DE-CM-005-인터페이스 명세서
6	통합테스트 결과서	SMC-DE-CM-006-통합테스트결과서
7	관리자 매뉴얼	SMC-DE-CM-007-관리자 매뉴얼
8	사용자 매뉴얼	SMC-DE-CM-008-사용자 매뉴얼

○ 하드웨어 산출물

- 납품물품 사진첩 별도 첨부