함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사) 제2회

1. 생산관리과-17689호(’16.12.23) 및 한국종합 2016-11-79호(’16.12.21)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하고 있는 『자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사』건의 설계변경(제2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사(토목,건축,기계)

나. 공사기간 : 2016. 04. 20. ~ 2016. 12. 31.

다. 도 급 비 : 3,200,307,000원

라. 도 급 자 : 아이엠유건설(주)

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

사. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비고
공급가액	2,909,370,000	2,909,170,000	감	200,000
부가가치세	290,937,000	290,917,000	감	20,000
도 급 비	3,200,307,000	3,200,087,000	감	220,000

아. 계약금액 조정 사유

- 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사 진행중 펌프동 도색, 취수장 전면 포장 등에 따른 공사장 여건 변경 및 추가 정비물량 발생에 따른 설계변경 반영

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	유양현		생산관리과장	한희선		생산부장	12/26 구자훈
협조자	주무관	이혜민		주무관	김성민		재무회계과장	박병식
시행	생산관리과-17715	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1315	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)