투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	「재사용플라자 건립공사」설계변경 협의 및 업무협조 요청

1. PC재사용16-648호(2016.12.16.)호와 관련입니다.

2. 서울시 재사용플라자 건립공사 현장의 오수처리 설계변경 추진과 관련하여 아래사항을 협의하오니 2016.12.30(금)까지 검토의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 재사용플라자 건립공사 준공(2017. 3.15)이전에 정화조 및 오수관 연결공사가 완료될 수 있도록 적극적인 업무협조를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 협의내용

- 하수도과학관 부지(연결데크옆)에 정화조 설치 및 시 공공오수관 연결 가능여부

붙임 1.  재사용플라자 건립공사 오수처리(토목) 설계변경 요청(건설사업관리단) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장)
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	12/27 김진용
협조자
시행	건축부-18365	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)