투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	IT Complex 건립공사 책임감리원
(경유)
제 목	하도급계약 변경사항 처리 알림(IT-COMPLEX 건립공사)

1. 상암ITC감 제14-32호(2014.03.19)와 관련입니다.

2. 위 대호로 아래와 같이 우리 본부에 검토 보고한「IT COMPLEX 건립공사」의 하도급계약 변경사항(방수공사 외 2개 공종)에 대하여 처리 후 알려드리니 하도급 관리 및 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 하도급 계약사항 변경 내용(3개 공종)

연번	공 종	업 체	공사기간		비고
			당 초	변 경
1	방수공사	㈜이건사	2010.11.01. ~ 2014.10.06	2010.11.01. ~ 2015.10.06	하도급액 변경없음
2	습식공사 (조적,미장,타일)	㈜세신 이엔씨	2010.09.08. ~ 2014.10.06	2010.09.08. ~ 2015.10.06	〃
3	인테리어 공사	㈜인플랜	2011.07.04. ~ 2014.10.06	2011.07.04. ~ 2015.10.06	〃

끝.

								서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							김민규				건축총괄과장					강성욱					건축부장					03/20 이병석
협조자				주무관							장충근
시행			건축부-3442										(						)		접수												(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층																/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2606							/전송			02-3708-2659					/	skyrat@seoul.go.kr													/	부분공개