문서번호	기획관리과-12642
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	12/27 이계헌
협조

연료탱크 교체공사 완료 보고

2016. 12.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

연료탱크 교체공사 완료 보고

우리 센터 지하층「연료탱크 교체공사」가 완료됨에 따라 본 공사에 대해 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 데이터센터 연료탱크 교체공사

*********************

○ 공사기간 : ’16. 12. 02 ~ 12. 24 (총 22일)

****************************

***********************************

□ 추진경과

○ ’16. 11. 15.	:	연료탱크실 정비 계획
○ ’16. 12. 02.	:	공사 계약
○ ’16. 12. 05.	:	공사 착공
○ ’16. 12. 24.	:	공사 완료 및 준공서류 제출

□ 설계변경 _ 공사비 변경 없음

○ 준공내용(세부내역)

(단위 : 원)

구분	변경전	변경후	공사비 증감액	비고
철거공사	유기가스 치환 및 청소, 폐기물 처리	좌동	해당없음
	임시탱크 설치(FRP, 2,000ℓ)	좌동
		기존펌프(2EA) 해체 및 신규탱크설치 후 재설치
탱크신설	유류탱크(1EA, 3,000ℓ) 설치	좌동
	위험물 표지판	삭제
	탱크신설 인허가 (소방서)	좌동
	신설 충수시험 및 비파괴(기압) 검사	좌동

□ 준공검사 : 적합

○ 검사내용 : 별첨 “준공검사조서” 참조

□ 행정사항

○ 공사대금 지급

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 청사유지관리, 데이터센터 옥상시설 방수공사, 시설비

붙임 : 1. 준공검사조서(별첨) 1부.

2. 준공확인 요청 및 준공서류 각 1부.

3. 준공검사체크리스트 1부.  끝.