투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 물량 변경요청(양재대로녹지연결로 조성공사-레미콘)

1. 우리부에서 시행하고 있는 「양재대로 녹지연결로 조상공사」에 대한 관급자재(레미콘) 물량을 아래와 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

납품 요구번호	품 명	규 격	단위	수 량			납품기한 (변경없음)	비 고
				당초	변경	증.감
12-16-1- 40193-00	레미콘	25-24-150	㎥	2,116	1,991	감)125	‘17.06.30
	레미콘	25-35-150	㎥	719	719	-	‘17.06.30
	레미콘	25-18-80	㎥	129	63	감)66	‘17.06.30
	레미콘	25-21-150	㎥	17	83	증)66	‘17.06.30

붙임 : 1. 관급자재 변경 요구서 1부.

2. 관련 근거 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	김소연		주무관	채지은		환경시설과장	12/23 조성만
협조자
시행	방재시설부-20543	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	대시민공개