문서번호	보행정책과-7298
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보행정책팀장	보행정책과장
이동주		김현중	12/23 이방일
협조

'16년 도심보행길 조성사업 용역 계약 변경 계획

2016. 12.

도시교통본부

(보행정책과)

’16년 도심보행길 조성사업 용역 계약 변경 계획

’16년 도심보행길 조성사업 용역 계약과 관련, 시민이 체감할 수 있고 내실있는 스토리텔링 및 표출방안 마련을 위해 추가 소요기간이 필요해 계약기간을 연장하고자 함

□ 개    요

❍ 계 약 명 : ’16년 도심보행길 조성사업 용역

❍ 계약기간 : 2016.9.22. ~ 2016.12.31

❍ 계 약 자 : ㈜매스씨앤지

❍ 계약금액 : 금161,500,000원(금일억육천일백오십만원)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 계약 변경내용 : 계약기간

❍ 계약기간 변경내용 및 연장사유

항 목	기 존	변 경	비 고
계약기간	2016.9.22. ~ 2016.12.31	2016.9.22. ~ 2017.03.31	-
기간연장 사유	○ 스토리텔링 콘텐츠 발굴 및 표출방안 모색을 위한 추가 기간소요		-

❍ 계약금액 : 변동없음(※지체상금 부과 : 부과없음)

□ 향후 추진일정

❍ 변경계약(계약기간 연장)의뢰 : ’16. 12. 23

❍ 용역준공 및 정산:  ’17. 3. 31 ~

붙 임 : 1) 준공기한 연기의뢰서. 1부.

2) 합의각서. 1부.  끝.

【 붙 임 】

준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : ’16년 도심보행길 조성사업 용역

나. 계약업체 : ㈜매스씨앤지

다. 계약금액 : 금161,500,000원(금일억육천일백오십만원)

라. 계약년월일 : 2016. 9. 22.

마. 착수년월일 : 2016. 9. 23.

바. 준공기한   : 2016. 12. 31.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2017. 3.31.(90일 연장)

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 부과없음

라. 연기사유

-  스토리텔링 콘텐츠 발굴 및 표출방안 모색을 위한 추가 기간소요

2016 년  12월  23일

보행정책과장 이방일 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하