투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 통보(서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(총괄5회, 8차3회,9차1회)

1. 도시철도토목부-15659(2016.12.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 변경계약 의뢰한 공사건에 대하여 다음과 같이 변경계약체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

******************************서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

**********************************************외2개사

**************************

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	총부기	2009.12.31.~2016.12.31.	2009.12.31.~2018.12.31.	기본계획변경
	8차3회	2015.12.17.~2016.12.31.	변경없음
	9차1회	2016.06.23.~2016.12.31.	2016.06.23.~2017.05.31.	기간연장
계약금액	총부기	208,237,521,000원	209,159,217,500원	증921,696,500원(공사손해보험반영)
	8차3회	42,500,000,000원	변경없음	설계변경
	9차1회	12,720,000,000원	변경없음	설계변경

*****************************************

첨부 : 1)공사변경계약서(별도송부) 각1부.

2)계약변경내역서(총괄5회, 8차3회,9차1회) 각1부

3)합의각서 각1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	이강준		경리과장	최정수		건설총괄부장	12/23 代안순봉
협조자
시행	건설총괄부-28603	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2362	/전송	02)3708-2365	/	lgj1011@seoul.go.kr	/	부분공개(5)