문서번호	정수시설과-4138
결재일자	2016.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		임두선	12/26 이달영
협조

구의아리수정수센터 사각농축조 철거 건설폐기물처리용역

설계변경 심의결과 보고

2016. 12.

구의아리수정수센터 사각농축조 철거 건설폐기물처리용역

설계변경 심의결과 보고

구의아리수정수센터 사각농축조 철거 건설폐기물처리용역 시행중 물량의 감소에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		용역현황

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 구의아리수정수센터 건설폐기물처리용역

❍ 용역기간: 2016. 12. 9. ∼ 2016. 12. 27.

❍ 계약금액: 금49,260,000원

❍ 계 약 자: 세창환경건설㈜ 대표 최기식

❍ 용역규모

- 건설폐기물 운반: 910㎥

- 건설폐기물 처리: 2,093톤

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내역

❍ 건설폐기물 운반: 당초 910㎥, 변경 633.2㎥(감276.8)

❍ 건설폐기물 처리: 당초 2,093톤, 변경 1,456톤(감637)

□ 총괄 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감
공급가액	44,781,818	31,150,000	감13,631,818
부가세	4,478,182	3,115,000	감 1,363,182
도급금액	49,260,000	34,265,000	감14,995,000

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 감소 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부: 적정

□ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.