함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(2차) 및 차수별 금액변경 시행에 따른 계약의뢰(천호1동외17개동)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 아래 공사에 대하여 설계변경(2차) 및 차수별 금액변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 천호1동 외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 당초 - D=15~300mm, L=2,242m

변경 - D=15~300mm, L=2,074m

다. 최대이행예정금액 : 당초 - 금300,000,000원

변경 - 금400,000,000원

라. 공사기간 : 2016.05.31. ~ 2016.12.31.(총부기기한 2016.05.31.~2017.06.30)

마. 계 약 자 : (주)다미씨앤씨 대표 서춘희

바. 변경사유 : 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

사. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
총부기금액	665,759,490	665,759,490	총부기금액 변경없음
1차금액(2016년)	450,000,000	592,665,700	증) 142,665,700
2차금액(2017년)	215,759,490	73,093,790	감) 142,665,700

붙  임 : 1. 내부품의서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	양봉우		시설관리과장	12/26 代송종범
협조자
시행	시설관리과-26548	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(6)