급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		주무관	시설관리과장			결재
이동석		강동철	12/28 천성훈
협 조

영등포구관내 상수도공사 감독업무 수행중 아래와 같이 공사기한 연기 변경사유가 발생하여 보고합니다.

2016. 12.   .

직 지방시설주사보 성명: 이동석

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	*************	***	‘16.12.17 ~ ’16.12.29	신설-204	40mm*5m	하송이엔씨

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 내부공사 지연으로 인한 급수공사기간 연기

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	*************	‘16.12.17 ~ ’16.12.29	‘16.12.17 ~ ’17.01.20	수요가 사정

붙 임 : 급수공사연기원 1부. 끝.