“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	문화체육관광부장관(관광개발과장)
(경유)
제목	한강 관광자원화 사업기간 연장 승인 신청

1. 관련근거

가. 한강협력계획 공동발표(2015. 8. 24.)

나. 문화체육관광부 관광레저기반과-477호(2016. 3. 2.)

다. 문화체육관광부 관광레저기반과-677호(2016. 3. 23.)

라. 문화체육관광부 관광레저기반과-771호(2016. 3. 30.)

2. 우리 시와 중앙정부가 협력하여 추진중인 한강 관광자원화 사업의 `16년 교부결정에 대해 다음과 같이 사업기간 연장 신청하오니, 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

사 업 명	사 업 기 간		교부내용(백만원)	연 장 사 유 (추진현황)
	당초	변경
통합선착장 조성	‘16년	‘16년~‘17년	기본설계·실시설계비 및 기타비용 (600, 자본)	다양한 대안 검토, 한강시민위 협의 등으로 설계 착수지연 (마스터플랜 수립중)
피어데크 조성	‘16년	‘16년~‘17년	기본설계·실시설계비 및 기타비용 (850, 자본)
여의테라스 조성	‘16년	‘16년~‘17년	타당성 조사비(100, 자본)	통합선착장, 피어데크 연계검토 이행으로 준공 시기 미도래 (기본계획 및 타당성조사중)
복합문화시설 조성	‘16년	‘16년~‘17년	타당성 조사비(100, 자본)
밤섬생태관찰데크	‘16년	‘16년~‘18년	기본설계·실시설계비(200, 자본)	현상공모 유찰에 따른 지명공모로 설계 착수 지연 (설계공모 완료)
이동형문화편의시설 조성	‘16년	‘16년~‘17년	제작 및 설치비(600, 자본)	사업계획 변경에 따른 착수 지연 (제작·설치업체 공모중)
공공예술공간 조성	‘16년	‘16년~‘17년	기본·실행계획 수립(70, 자본) 공공예술작품 설치(450, 자본) 프로젝트 운영(80, 경상)	다양한 검토를 위한 기본계획, 마스터플랜 별도 이행 (시범사업 추진중)

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	민경욱		재생전략팀장	한휘진		재생정책과장	12/28 여장권
협조자	개발정책팀장	이상면		한강관광사업과장	손창열
시행	재생정책과-14961	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8622	/전송	02-2133-0746	/	gganzook@seoul.go.kr	/	부분공개(5)