“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 (2016년 교통신호 원인자공사 감리용역)

우리 부서에서 추진중인 용역사업에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2016년 교통신호 원인자공사 감리용역

나. 용역기간 : 2016.06.09.~2016.12.31.

다. 계약금액 : 금60,758,000원

라. 계약업체 : ㈜영호이앤씨 (대표 서태교)

마. 변경내역

【단위 : 원】

구분	설계변경			비고
	변경전	변경후	증감액
계약금액	60,758,000	174,900,000	114,142,000

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증감에 따른 감리비 정산

사. 예산과목 : 세입세출외현금(공공시설손실부담금)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 검토 보고서 1부.  끝.

	교통운영과장
★주무관	임정규		신호시설팀장	구봉서		교통운영과장	12/27 강진동
협조자	계약2팀장	代고수봉
시행	교통운영과-25044	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2484	/전송	02-2133-1053	/	jglim229@seoul.go.kr	/	대시민공개