투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(총차)』 준공기한 연기요청

1. 우리본부에서 장기계속사업으로 시행중인 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 총차 공사기간을 아래와 같이 변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(총차)

나. 공사규모 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

다. 계약금액 : 312,237백만원

라. 공사기간 : 2009.11.09 ~ 2017.02.28 (총공사 2,666일)

마. 시 공 사 : 대림산업(주) 외 5개사

바. 공사기간 연기

차수	구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
총괄	공사기간	2009.11.09 ~ 2017.02.28	2009.11.09 ~ 2018.02.28	증) 365일
	도 급 비	312,237,000,000원	좌동	-

붙임 : 1) 총차공사 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2) 합의서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	조양연		환경시설과장	代조양연		방재시설부장	12/28 임춘근
협조자
시행	방재시설부-20756	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	0237088783	/전송	0237088756	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개