“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	감리용역 착수일자 변경 요청

1. 계약번호 20161*******00(2016.12.26.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 계약한 용역사업의 착수일자를 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역

나. 용역기간 : 2016.12.26.~2017.02.23.

다. 계약금액 : 금21,054,000원

라. 계약업체 : ㈜건영이앤씨 (대표 박준범)

마. 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
착 수 일	2016.12.26.	2017.03.01.
용역기간	2016.12.26. ~2017.02.23.	2016.12.26. ~2017.04.30.	착수일로부터 2개월

바. 변경사유 : 동절기 굴착금지로 인한 공사중지.  끝.

	교통운영과장
★주무관	임정규		신호시설팀장	代백성현		교통운영과장	12/28 강진동
협조자
시행	교통운영과-25277	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2484	/전송	02-2133-1053	/	jglim229@seoul.go.kr	/	대시민공개