“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	‘16/’17년 광화문광장 제설작업용역 설계변경 및 2차(2017)년도 계약요청

우리 과에서 진행중인「‘16/’17년 광화문광장 제설작업용역」에 대하여 1차정산 (2016년)및 2차(2017)년도 계약을 위하여 설계변경하고 변경계약의뢰 합니다

가. 용 역 명 : ‘16/‘17년 광화문광장 제설작업용역(2017년)

나. 장    소 : 광화문광장

다. 계약금액

- 당초 : 전체 42,962,770원(1차 : 20,460,000원, 2차 : 22,502,770원)

- 변경 : 전체 22,502,770원(1차 : -원, 2차 : 22,502,770원)

라. 총계약 기간 : 2015.11.24 ~ 2016. 3.15

※ 금회계약기간(2차) : 2017. 1.1 ~ 2017. 3.15

마. 용역회사 : **********

바. 설계변경사유 : 2016년 실제 제설작업량을 반영하여 변경

사. 예산과목 : 역사도심활성화, 광화문광장 관리 운영, 공공운영비(100-201-02)

아. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 계약금액	42,962,770	22,502,770	(감) 20,460,000
1차년도(2016)	20,460,000	-	(감) 20,460,000
2차년도(2017)	22,502,770	22,502,770	-

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 및 변경내역서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	정재현		도심관리팀장	양철수		역사도심재생과장	12/28 代오승민
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-15946	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8506	/전송	02-2133-0742	/	jjhdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)