문서번호	시설과-7391
결재일자	2016.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	12/29 이춘희
협 조

2016년 자체 설계심사 시행 결과 보고

2016. 12.

동부공원녹지사업소

(시설과)

2016년 자체 설계심사 시행 결과 보고

2016년 우리사업소내 각 부서 및 산하공원에서 요청한 계약심사 미대상 소규모 공사에 대한 자체 설계심사 시행 결과를 보고 함.

※ 관련근거:2016년 자체 설계심사 운영계획, 시설과-482(2016.2.1.호)

□ 설계심사 개요

○ 기    간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

○ 대    상 : 우리사업소 계약심사 미대상인 소규모 공사

(※계약심사 대상 : 조경공사 3억원 이상)

○ 심사시기 : 공사발주 전 설계심사

○ 주요내용

- 계약심사 미대상인 소규모 공사의 설계도서(도면, 내역서 등)검토를 통하여

공사품질 향상 및 예산절감

○ 심사방법

- 심사위원 : 3인이상(설계심사 담당, 해당분야 담당, 팀장, 과장 등)

- 심사내용 : 도면, 내역서 등 설계도서 검토

- 심사결과 : 내부방침 후 해당부서로 통보(심사결과 반영하여 공사발주)

□ 운영실적

○ 2016.02.26 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기) 심사

○ 2016.02.26 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(통신) 심사

○ 2016.06.15 : 서울숲공원 시설보수 및 생육환경 개선공사 심사

○ 2016.07.26 : 천호공원 무장애 친화공원 조성공사 심사

○ 2016.08.02 : H2빌 녹색자금 지원 복지시설 나눔숲 조성공사 심사

○ 2016.09.01 : 2016년 보라매공원 시설물 정비공사 심사

○ 2016.12.19 : 보라매공원 현장근로자 대기실 환경개선공사 심사

○ 2016.12.20 : 보라매공원 현장근로자 기존 대기실 폐기물처리 용역 심사

□ 예산절감액 : 총 12,190천원

( 단위 : 천원 )

사업명		요청부서	심사전 설계비	심사후 설계비	증감 (예산절감액)	비고
1	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기)	시설과	124,960	120,450	감)4,510
2	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(통신)	시설과	26,290	25,300	감)990
3	서울숲공원 시설보수 및 생육환경 개선공사	서울숲공원	296,150	290,210	감)5,940
4	천호공원 무장애 친화공원 조성공사	시설과	208,360	208,360	변동 없음
5	H2빌 녹색자금 지원 복지시설 나눔숲 조성공사	시설과	127,000	127,000	변동 없음
6	2016년 보라매공원 시설물 정비공사	시설과	222,000	221,250	감)750
7	보라매공원 현장근로자 대기실 환경개선공사	시설과	11,429	11,429	변동 없음
8	보라매공원 현장근로자 기존 대기실 폐기물처리 용역	시설과	12,221	12,221	변동 없음
합 계					감) 12,190

□ 주요지적 및 조치사항

○ 설계내역서 작성

- 적합한 원가계산 요율 적용 : 간접노무비, 산업안전보건관리비 등

- 도면에 적합한 일위대가 작성

- 시공여건을 고려하여 일위대가 작성

- 적정한 노임, 자재 단가 적용

- 도면 내역서 수량 일치

○ 도면 작성

- 현장여건 및 시공을 고려하여 도면 작성

- 도면 내역서 수량 일치

- 세부 상세도 추가 작성

□ 설계심사 효과

○ 설계 미비에 따른 시공업체와 분쟁 발생 사전 방지

○ 공사품질 향상 및 예산절감에 기여

□ 향후계획

○ 2017년 자체 설계심사 계획 수립 및 시행. 끝.