투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 박 영 배 귀하
(경유)
제 목	「재사용플라자 건립공사」휴일작업 처리 통보 및 공정관리 철저

1. PC재사용16-3182(2016. 12. 29.)호와 관련입니다.

2.『재사용플라자 건립공사』휴일작업 계획(2017년 1월) 승인 요청에 대하여 승인하며, 2017년 1월중 휴무일이 5일으로 공기지연이 예상되므로 차수별 공사기한내 공사완료 될수록 공기만회 대책을 수립·시행하시기 바랍니다.

3. 아울러, 공사계약사항이 미이행될 경우 관련규정에 따라 지연배상금이 부과됨을 알려드리니 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	12/29 김진용
협조자
시행	건축부-18581	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)