함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	선금정산 및 3차 기성금(준공) 지급 보고 [자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사-3차기성(준공)]

생산부 생산관리과로부터 「자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비」공사에 대한 기성검사조서가 제출되어 아래와 같이 기성금액에서 선금을 정산하고자 합니다.

가. 건   명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사

- 계 약 자 :******************

- 계약금액 : 금3,126,695,000원(금삼십일억이천육백육십구만오천원정)

- 계약기간 : 2016. 04. 18. ～ 2016. 12. 31.

나. 선금 지급액 : 금495,000,000원(금사억구천오백만원정)

다. 금회 기성액 : 금809,325,000원(금팔억구백삼십이만오천원정)

라. 선금 정산액 : 금129,039,000원(금일억이천구백삼만구천원정)

- 선금액(495,000천원)/계약금액(3,126,695천원)×기성액(809,325천원)

마. 금회 지급액 : 금680,286,000원(금육억팔천이십팔만육천원정)

(단위:천원)

계약금액	전회누계 기성금액	금회 선금정산액	금회지급액	선금정산
				계	기정산	금회정산	잔액
3,126,695	2,317,370	129,039	680,286	495,000	365,961	129,039	0

바. 지급총액 : 금3,126,695,000원(금삼십일억이천육백육십구만오천원정)

- 선금금액(495,000천원)+1차기성금지출액(414,330천원)+1,2차노무비(36,564천원)

+ 2차기성지출액(1,414,951천원)+3,4차 노무비(85,564천원)+금회지급액(680,286천원)

붙 임 :	1. 기성관련 서류 각 1부.  끝.

,,

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	박병만		경영관리부장	12/29 정진일
협조자
시행	재무회계과-18854	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)