등록번호	도시디자인과-19365		주무관		디자인팀장	도시디자인과장		도시관리국장		부구청장
등록일자	2016.12.29.
			이장환		정복남	이상현		이진형		전결 12/29 황치영
결재일자	2016.12.29.
공개구분	부분공개(5)
			협조	도로시설과장			이동훈
				안전건설국장			이우룡
다산성곽길, 남소영길 지중화공사 추진부서 변경
도시관리국 (도시디자인과)

다산성곽길, 남소영길 지중화공사 추진부서 변경

『다산성곽길, 남소영길 지중화공사』등 도시디자인과에서 추진 중인 지중화공사를 지중화총괄부서인 도로시설과로 이관하여 사업을 진행

하고자 함.

Ⅰ		추진근거

시책사업 보고회 구청장 지시사항(2016.12.21.)

Ⅱ		대상사업

다산성곽길 지중화사업(동호로17길)

남소영길 지중화사업(퇴계로56길)

Ⅲ		사업개요

다산성곽길 지중화사업

❍ 기  간 : 2016. 1. ~ 2017. 6.

❍ 구  간 : 장충체육관 입구~성곽공영주차장(동호로17길) 약1.3km

❍ 내  용 : 한전 외 6개업체 공중선 지중화

❍ 비  용 : 7,200백만원

[주관사 2,500백만원, 구비 2,900백만원, 시비 1,800백만원(1,550백만원 확보)]

❍ 추진현황

- 2016.3.17 : 한전 지중화공사 협약체결

- 2016.3.22 : 서울시 투자심사 통과

- 2016.7.15 : 한전 실시설계 완료

- 2016.9. 5 : 한전 공사업체 선정(대금이앤아이, 전기업체)

- 2016.9. 7 : 문화재청 심의 – 부결(암반굴착계획 제시)

- 2016.10.12 : 문화재청 재심의 – 조건부허가(사전 시굴조사)

- 2016.11.21.~23. : 문화재 시굴조사 시행(공사가능, 단 성안길 불가)

- 2016.12.7 : 문화재청 발굴조사 완료 통보

- 2016.12.19 : 동절기 굴착통제 완화하여 공사시행

❍ 향후계획

- 2017.3.31 : 한전, 통신 관로공사 완료

- 2017.4.~5.: 케이블 공사 완료

- 2017.6.30 : 전깃줄, 전봇대 철거 완료

남소영길 지중화사업

❍ 기  간 : 2016. 1. ~ 2017. 6.

❍ 구  간 : 덕화장중화요리 ~ 수정약국(퇴계로56길) 약330m

❍ 내  용 : 한전 외 6개업체 공중선 지중화

❍ 비  용 : 2,400백만원

[주관사 1,030백만원, 구비 855백만원, 시비 515백만원(미확보)]

❍ 추진현황

- 2016.4.29 : 2016년 1차추경 예산확보(구비563백만원)

- 2016.6.23 : 한전 등 현장 점검 및 설계(안) 변경 협의

- 2016.7.21 : 2017년 시예산편성 요구(시비 515백만원)

- 2016.12.14 : 한전 지중화공사 협약체결

❍ 향후계획

- 2017.3. : 지중화 관로공사 시행

- 2017.3. : 시비 예산확보(2017년 추경)

- 2017.4. : 케이블 공사 시행

- 2017.6. : 전신주 철거 및 지중화 공사 준공

Ⅸ		향후 계획

도시디자인과에서 추진 중인 지중화공사를 도로시설과로 이관

진행 중인 공사임을 감안하여 인수인계 철저