“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재난안전과-27155		주무관		도시관제팀장		재난안전과장		안전교통국장	부구청장
			김형윤		배건형		장원석		박은섭	12/29 주윤중
등록일자	2016.12.28.
결재일자	2016.12.29.
공개구분	대시민공개
			협조자

소제목입력부분

2016년 하반기 CCTV 설치 및 성능개선 공사 완료

사업기간 : 2016. 8 ~ 12월

완료내용

❍ 방범용 CCTV 90개소 신규설치

❍ 불법주정차단속용 CCTV 16개소 신규설치

❍ 노후 CCTV카메라 등 240개소 성능개선

❍ 영상정보저장장치 1,300TB 증설 등

계약방법 : 경쟁입찰

소요예산 : 금3,283,402천원

2016. 12.

	강 남 구
(		재난안전과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 개인정보보호법 제25조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 민선6기 ‘방범 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치확대’ 공약사업 추진 • 2016년 하반기 CCTV 추가 설치 계획(부구청장방침, 2016. 6. 30.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 전 자치구 시행 중
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

2016년 하반기 CCTV 설치 및 성능개선 공사 완료

2016년 하반기 방범 및 주차단속용 등 CCTV 107개소에 신규설치와  노후 CCTV 카메라 등을 240개소 성능개선 완료 하였음

Ⅰ		관련근거

2016년 하반기 방범용 CCTV 신규설치 추진 계획 (재난안전과-16708, 2016. 8. 11.)

2016년 하반기 CCTV 설치 및 성능개선 공사 추진 계획 (재난안전과-17838, 2016. 8. 29.)

2016년 하반기 CCTV 영상정보 저장장치 확충 계획 (재난안전과-31434, 2016. 10. 17.)

Ⅱ		추진개요

사업목적

❍ CCTV 신규설치로 안전한 강남구현 및 주민 민원해결

❍ 노후CCTV 시설(카메라, 비상벨)의 성능개선을 통한 CCTV기능의 안정적 유지

사업기간 : 2016. 8 ~ 12월

주요 공사완료 내용

❍ CCTV 신규설치 107개소(방범 90, 불법주정차단속 16, 도로방범 1) 완료

❍ 노후 CCTV 시설 240개소 240개소(방범 105, 주정차단속 30, 방범비상벨  100, 치수관리 5) 성능개선

❍ 관제센터 인터넷 연동 및 온라인 지리정보시스템(GIS) 도입

❍ 품질·시공·안전관리 등 하자없는 공사를 위해 책임감리용역 실시

❍ CCTV 영상정보저장장치(Storage) 1,300TB 확충

❍ CCTV카메라 965대 구매(주 251, 보조 714)

소요예산 : 3,283,402천원

Ⅲ		세부 추진결과

사업구분	사업물량	사업기간	소요예산 (천원)	계약방법	비고
방범용 CCTV 설치공사(3차)	- 신규설치 83개소	2016.8 ~ 12월	935,000	일반공개경쟁
공사용 관급자재 구매(3차)	- 카메라 420대 구매 (주-80, 보조-340)	2016.10 ~ 11월	330,425	일반공개경쟁
CCTV 설치 및 성능개선공사(4차)	- 신규설치 24개소 - 성능개선 240개소 - 인터넷연동 기반시설 구축 등	2016.9 ~ 12월	1,163,881	제한경쟁(실적)
공사용 관급자재 구매(4차)	- 카메라 545대 구매 (주-171, 보조-374)	2016.10 ~ 12월	465,736	일반공개경쟁
CCTV 공사 감리용역	- 하반기 CCTV 공사 감리용역	2016.8 ~ 12월	36,668	전자공개 수의계약
영상정보 저장장치 확충	- 1,300TB 확충 (물리적 용량 기준)	2016.11 ~ 12월	351,692	일반공개경쟁
합 계			3,283,402

1		방범용 CCTV 신규설치

CCTV 설치공사

❍ 공 사 명 : 2016년 하반기 방범용 CCTV 신규설치 공사

❍ 계 약 자 : ㈜금탑전기통신 (방은석, 대전광역시 대덕구)

❍ 주요공정

- 방범용 CCTV 신규설치 83개소

- 하자없는 공사를 위해 책임감리용역 실시 (※ 성능개선공사와 통합감리 실시)

❍ 계약방법 : 일반공개경쟁

❍ 준공금액 : 금935,000,000원

❍ 공사기간 : 2016. 9. 28. ~ 12. 15.

❍ 세부 추진일정

- 설치장소 선정 및 위원회 개최 : 2016.  8.  5. ~  9. 12.

- 입찰공고 및 계약             : 2016.  8. 31. ~  9. 21.

- 착공 및 공사시행             : 2016.  9. 28. ~ 12.  9.

- 종합 시운전(5일간)            : 2016. 12. 10. ~ 12. 14.

- 준공                         : 2016. 12. 15.

❍ 공사 사진자료

(전용지주) 청담동 132-16	(한전주) 청담동 30-33

공사용 자재(CCTV 카메라) 구매

❍ 계 약 명 : 2016년 하반기 방범용CCTV 신규설치 관급자재 구매

❍ 계 약 자 : ㈜유현정보통신 (박승수, 광주광역시 서구)

❍ 구매내역 : 420대(회전형카메라 80대, 보조카메라 340대)

❍ 계약방법 : 일반공개경쟁

❍ 준공금액 : 금330,423,730원

❍ 납 품 일 : 2016. 11. 22.(납품기한 : 2016. 11. 22.)

❍ 세부 추진일정

- 입찰공고 및 계약 : 2016. 10.  7. ~ 11. 2.

- 납품완료         : 2016. 11. 22.

❍ 카메라 제원

회전형 주카메라	고정형 보조카메라
∘ 200만화소, 회전형(PTZ) ∘ 광학 30배줌, 디지털 16배줌, IP66	∘ 300만화소, 고정형 ∘ IR LED투광거리 30m, IP66

2		주정차단속용 CCTV 등 설치 및 성능개선

주정차단속용 CCTV 관련 공사

❍ 공 사 명 : 2016년 하반기 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사

❍ 계 약 자 : ㈜경봉 (윤석원, 경기도 안양시)

❍ 주요공정

- 방범용 CCTV 신규설치 24개소(공원방범 7, 불법주정차단속 16, 도로방범 1)

- 노후 CCTV시설 성능개선 240개소(방범 105, 주정차단속 30, 방범비상벨 100, 치수관리  5)

- 관제센터 내 노후서버 교체 및 인터넷연동 기반시설 구축 등

- 하자없는 공사를 위해 책임감리용역 실시  ※ 방범용CCTV 설치공사와 병행

❍ 계약방법 : 제한경쟁(실적제한)

❍ 준공금액 : 1,163,880,800원

❍ 공사기간 : 2016. 9. 28. ~ 12. 16.(준공기한 : 2016. 12. 31.)

❍ 세부 추진일정

- 입찰공고 및 계약  : 2016.  9. 30. ~ 10. 19.

- 착공 및 공사시행  : 2016. 10. 20. ~ 12. 10.

- 종합 시운전(5일간) : 2016. 12. 11. ~ 12. 15.

- 준 공             : 2016. 12. 16.

❍ 공사 사진자료

(방범신규) 역삼동 666-2	(주정차단속용 신규) 수서동 207-10
(도로방범용 신규) 세곡동 103	(방범 성능개선) 개포동 1246-7

공사용 자재(CCTV 카메라) 구매

❍ 계 약 명 : 2016년 하반기 신규설치 및 성능개선 공사 관급자재 구매

❍ 계 약 자 : 우주미디어정보통신(주) (김용석, 경기도 수원시)

❍ 구매내역 : 545대(회전형카메라 171대, 보조카메라 374대)

❍ 계약방법 : 일반공개경쟁

❍ 준공금액 : 465,736,360원

❍ 세부 추진일정

- 입찰공고 및 계약 : 2016. 10.  7. ~ 10. 26.

- 납품완료         : 2016. 12.  1.

❍ 카메라 제원

회전형 주카메라	고정형 보조카메라
∘ 200만화소, 회전형(PTZ) ∘ 광학 30배줌, 디지털 16배줌, IP66	∘ 300만화소, 고정형 ∘ IR LED투광거리 30m, IP66

3		CCTV 설치공사 감리

❍ 계 약 명 : 2016년 하반기 CCTV 설치공사 감리 용역

❍ 계 약 자 : ㈜한정원(이수환, 서울특별시 송파구)

❍ 주요공정 : 하반기 CCTV 설치 공사 전반에 대한 책임감리(2인 상주)

❍ 계약방법 : 전자공개수의계약(지역제한, 서울)

❍ 준공금액 : 금36,668,890원

❍ 용역기간 : 2016. 9. 22. ~ 12. 23.(준공기한 : 2016. 12. 31.)

❍ 세부 추진일정

- 입찰공고 및 계약      : 2016.  8. 31. ~  9. 20.

- 착수 및 공사 감리시행 : 2016.  9. 22. ~ 12. 16.

- 보고서 작성 및 준공   : 2016. 12. 17. ~ 12. 23.

4		CCTV 영상정보 저장장치 확충

❍ 계 약 명 : 2016년 하반기 u-강남 도시관제센터 영상정보 저장장치 구매

❍ 계 약 자 : (주)월드아이 (신영구, 서울특별시 강북구)

❍ 구매내역 : 저장장치 물리적용량 1,300TB 확충 (총 가용용량 3,955TB)

❍ 계약방법 : 일반공개경쟁

❍ 준공금액 : 금351,692,000원

❍ 납 품 일 : 2016. 12. 1.(납품기한 : 2016. 12. 12.)

❍ 세부 추진일정

- 입찰공고 및 계약 : 2016. 11. 3. ~ 11. 17.

- 납품완료         : 2016. 12. 9.

Ⅳ		CCTV 운영 현황 현행화

목적별 CCTV 운영현황 : 총 1,588개소 / 3,938대

(2016. 12월 현재)

관리부서	사용기능		설치장소	운영개소(개소/대수)		관 제 현 황
재난안전과	방범	방범	이면도로 등	1,271 / 3,466	960 / 2,641	관제센터
		어린이보호	어린이보호구역 (101개 구역)		175 / 488
		공원안전	공 원 (138개)		110 / 311
경찰서 (강남,수서)		방범(이동형)	이면도로 등		26 / 26
재난안전과	불법주정차단속		간선도로 등	239 / 242
치 수 과	재난재해		펌프장, 탄천, 양재천 등	23 / 49		치수상황실
공원녹지과	산불감시		구룡산	9 / 9		공원녹지과
교통정책과	자전거보관소관리		삼성역 2번출구 1 / 2 수서역 1번출구 1 / 6 수서역 2번출구 1 / 1 학여울역 1 / 2	4 / 10		교통정책과
도로관리과	승강기관리		대도초 앞 육교 1 / 2 타워팰리스3차 앞 육교 1 / 1 수서동 지역난방공사 앞 육교 1 / 2	3 / 5		도로관리과
초등학교	어린이안전		개원초등학교 등 (30개교)	30 / 152		초등학교·관제센터 병행관제
재난안전과	교통흐름		간선도로	8 / 8		관제센터
재난안전과	도로방범		세곡동사거리 1 / 2	1 / 2		관제센터
합 계				1,588 / 3,938

주요 용도별 카메라 화소수

설치목적		합계(대수)	41만 화소	100만 화소	200만 화소	300만 화소	400만 화소
방범 (경찰설치 포함)	회전(주)	1,271(100%)	287(22.6%)	0(0%)	881(69.3%)	0(0%)	103(8.1%)
	고정(보조)	2,195(100%)	111(5.1%)	181(8.2%)	578(26.3%)	979(44.6%)	346(15.8%)
불법주정차단속	회전(주)	239(100%)	94(39.3%)	0(0%)	115(48.1%)	0(0%)	30(12.6%)
	고정(보조)	3(100%)	0(0%)	2(66.7%)	1(33.3%)	0(0%)	0(0%)

Ⅴ		추진성과

한전주에 CCTV 설치로 예산절감 및 주민불편 최소화

❍ 한전주에 CCTV 32개소를 설치하여, CCTV 전용지주 설치를 위한 도로굴착 및 전용지주 미설치 절감분으로 CCTV 8개소 추가 설치

❍ 기존 한전주에 설치하였기에 도로굴착시 소음, 먼지 등 주민불편 최소화

Ⅵ		향후계획

하자담보 책임기간 중 유지관리 철저(준공후 2년)

‘영상정보처리기기 운영현황’ 현행화(강남구 홈페이지)

[붙임] 2016년 하반기 CCTV 공사 위치 1부.  끝.