투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사(1차)]

우리 본부에서 시행 중인 「도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치  전기공사(1차)」의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대앞

○ 공사기간 : 2015.02.27. ~ 2016.12.30.(1차 2015.12.30.)

○ 공사금액 : 168.053,630원 (1차 40,000,000원)

○ 시 공 사 : (주)성강통신기술사사무소

○ 감 리 사 : 극동엔지니어링 주식회사

2. 준공기한 연기의뢰 현황

공사구분	차수	계약금액(원)	당 초	변 경	비고
전 기	총 차	168,053,630	‘15.02.13 ~ ’16.12.30	‘15.02.13 ~ ’16.12.30	변경 없음
	1 차	40,000,000	‘15.02.13 ~ ’15.12.30	‘15.02.13 ~ ’16.12.30

3. 연기사유 : 선행 공정인 토목공사 지연으로 인한 전기공사

시공여건 미조성

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서(1차) 1부. 끝.

	설비부장
주무관	김홍석		시책사업과장	임현근		설비부장	11/26 박기형
협조자
시행	설비부-15007	(		)	접수		(		)
우	03187	서울특별시 종로구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 15층 무교동	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8646	/전송	3708-8659	/	khs25@seoul.go.kr	/	부분공개(7)