문서번호	기전과-11048
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		代안종필	11/07 신응수
협조	주무관		박정민
	주무관		민성준

『2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매』

설계변경(2차) 검토보고

2016. 11.

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매』

설계변경(2차) 검토보고

교통안전시설물 유지보수를 위하여 시행중인 『2016년 교통신호등주 관급자재 (2구역) 구매』 건에 대한 1~3차 납품물량 정산 및 추가배정된 횡단보도 확충정비사업의 관급자재를 확보하고자 설계변경코자 함.

□ 추진현황

○ 2016. 4. 19 : 계약체결

○ 2016. 7.  9 : 1차 납품완료(등주 46본, 부착대 23본, 조가선 23set)

○ 2016. 8. 19 : 2차 납품완료(등주 47본, 부착대 28본, 조가선 28set)

○ 2016. 8. 26 : 1차 설계변경 및 1차 기성준공

○ 2016. 10. 5 : 3차 납품완료(등주 35본, 부착대 20본, 조가선 20set)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매

○ 계약기간 : 2016. 4. 19 ~ 2016. 11. 30

○ 도급업체 : ㈜신명이에스티 대표 신 종 순

○ 계약금액 : 금170,000,000

□ 설계변경 사유

○ 계약물량대비 3차 납품물량 변경에 따른 금액 조정

- 신호등주 40본 ⇒ 35본, 부착대 16본 ⇒ 20본, 조가선 16set ⇒ 20set

구 분	계약금액		증・감	비고
	변 경 전	변 경 후
계	170,000,000	170,147,000	(증) 147,000
관급자재비	165,538,787	165,629,982	(증) 91,195
특허료	4,461,213	4,517,018	(증) 55,805

○ 횡단보도 확충정비사업(광화문삼거리외7개소) 관급자재 확보 2,542만원

- 교통신호등주 16본(디자인 가로등통합 9본, 디자인 7본)

- 등주부착대 7본

- 부착대 조가선 7set

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증・감	비고
	변 경 전	변 경 후
계	170,000,000	195,568,000	(증) 25,568,000
관급자재비	165,538,787	190,376,000	(증) 24,837,213
특허료	4,461,213	5,192,000	(증) 730,787

‣ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설및보수

시설비(401-01)(금170,147,000원)

교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를위한

횡단보도확충, 시설비(401-01)(금25,421,000원)

□ 보고자 의견

○ 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매가 계약물량 대비 납품물량이 변경되고,

횡단보도 교통신호기공사(광화문삼거리외7개소) 관급자재비 예산을 활용하여

공사에 소요되는 자재를 확보하고자 설계변경을 추진코자 함.

붙임  1. 횡단보도 확충정비 교통신호기공사 발주계획 보고 1부.

2. 납품정산내역서(2구역) 1부.

3. 납품요청내역서(횡단보도확충정비) 1부.

4. 설계변경내역서(2구역-2차) 1부.  끝.