투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰[2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매]

1. 기전과-11048(2016.11.7)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2016년 교통신호등주 관급자재(2구역) 구매

나. 계약기간 : 2016. 4. 19. ~ 2016. 11. 30.

다. 계약업체 : ㈜신명이에스티 대표 신 종 순

라. 계약금액 : 금170,000,000원

마. 설계변경 내용

1) 계약금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	170,000,000	195,568,000	(증)25,568,000	-

2) 변경사유 : 물량정산 및 교통신호기공사 단위사업예산 반영

바. 예산과목 : 교통운영과,도시교통체계및소통개선,교통안전시설물관리,

교통신호기신설및보수, 시설비(금170,147,000원)

교통운영과,도시교통체계및소통개선,교통안전시설물관리,

보행불편해소를위한횡단보도확충정비, 시설비(금25,421,000원)

붙임 1. 설계변경 방침서 및 시행문 1부.

2. 설계변경내역서 갑지(2구역 2차) 1부.

3. 설계변경내역서(2구역 2차)) 1부.

4. 합의각서(2구역 2차) 1부.

5. 별도발주 제외 사유서(2구역) 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	백윤광		기전과장	11/10 代안종필
협조자	계약1팀장	조현
시행	기전과-11187	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개