투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉천천복개 외 1개소 정밀점검 용역 설계변경(정산) 시행

우리사업소에서 시행중에 있는 「봉천천복개 외 1개소 정밀점검 용역」에

대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 봉천천복개 외 1개소 정밀점검 용역

나. 용역기간 : 2016.05.02. ~ 2016.11.27.

다. 도 급 자 : (재)한국건설품질연구원

라. 설계변경(정산) 내역

구 분	당 초	변 경	증•감	비고
용역비	106,980,000원	106,880,000원	(감)100,000원

마. 설계변경 사유 : 자문위원 비용 정산 (당초 4인 → 변경 3인)

바. 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물운영(특), 시설물안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비(\106,880,000원)

붙임 : 설계변경 보고서 등 각 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	신동헌		시설보수과장	전결 11/17 이용재
협조자	관리단속과장	代노미경		계약1팀장	조현
시행	시설보수과-4916	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 (대림동)	/
전화	(02)3284-5469	/전송	(02)836-3093	/	sdh4035@seoul.go.kr	/	대시민공개