문서번호	시설보수과-4914
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
신동헌		11/17 이용재
협 조

정밀점검 용역 설계변경(정산) 보고

- 대방천복개 외 2개소 정밀점검 용역 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

정밀점검 용역 설계변경(정산) 보고

- 대방천복개 외 2개소 정밀점검 용역 -

우리사업소에서 시행중인 『대방천복개 외 2개소 정밀점검 용역』의

설계변경(정산) 보고 사항임.

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명 : 대방천복개 외 2개소 정밀점검 용역

용역기간 : 2016.05.02. ~ 2016.11.27.

대상시설물 : 대방천복개구조물, 사평지하차도, 기아대교(신교)

용 역 비 : \98,628,000원

용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주), ㈜한국건설방재연구원

Ⅱ		보 고 내 용

용역 계약내역중 자문비(자문위원 수당)에 대한 정산필요

- 변경내역 : 자문위원 4명 → 자문위원 3명 (감 1명)

설계변경(정산) 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감	비고
도 급 비	98,628,000	98,528,000	감 100,000

Ⅲ		검 토 의 견

정밀점검 용역 자문비용에 대하여 설계변경(정산) 처리하고 변경계약코자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.