투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(무인과속 단속카메라 제작구매 설치)

1. 우리사업소에서 시행중인 『광화문광장 무인과속 단속카메라 제작구매설치』의

준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

사 업 명	무인과속 단속카메라 제작구매 설치
공사개요	무인교통감시장치 1식(세종문화회관, 케이티광화문빌딩 앞)
계약기간	2016년 12월 12일 ~ 2017년 1월 11일
계약금액	전기 : 47,170,000원
계 약 자	㈜부기테크 대표 은 철 우

가. 준공기한 연기

- 당초 : 2016. 12. 12 ∼ 2017. 1. 11

- 변경 : 2016. 12. 12 ∼ 2017. 7. 31

나. 연기사유

- 동절기 광화문광장 노후포장도로 공사(토목)중지 및 준공기한 연장으로 이에 따른 무인교통감시장치 납품 및 부대공사 준공기한 연기

다. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 북부도로사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  1. 방침서 1부.

2. 착공계 및 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	기전과장
★주무관	백윤광		기전과장	12/15 이영목
협조자
시행	기전과-12556	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개