함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경계약의뢰(2016년 포장복구,중구,용산구 관내 상수도 단위공사 폐기물처리용역)-최종

1. 우리 사업소에서 시행중인 『2016년 포장복구,중구,용산구 관내 상수도단위공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)』건에 대하여 설계변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 2016년 포장복구,중구,용산구 관내 상수도 단위공사 건설폐기물처리용역                          (장기계속단가계약)

*********************

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
1차	2016.06.23. ~ 2016.12.31	2016.06.23. ~ 2016.12.31
2차	2017.01.01. ~ 2017.05.31	-
총차	2016.06.23. ~ 2017.05.31	2016.06.23. ~ 2016.12.31

라. 차수별계약금액 변경내역

구 분	당 초			변 경			증 · 감
	1차부기금액	2차부기금액	총계약금액	1차부기금액	2차부기금액	총계약금액
*****	**********	**********	***********	***********	*	***********	*************

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비

자본적지출, 유형자산취득, 배급수비, 시설비 및 부대비

시설비(노후배급수관정비-21103)

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 물량증감 및 부기금액 변경.

첨부 : 1. 설계변경 품의서 및 설계변경 도서1부.

2. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김지훈		주무관	유명수		계약2팀장	양주춘		급수운영과장	전결 12/29 김수영
협조자
시행	급수운영과-29707	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 급수운영과	/
전화	02-3146-2168	/전송	02-3146-2189	/	noyeah@seoul.go.kr	/	부분공개(7)