문서번호	설비부-20431
결재일자	2016.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		유병기	12/29 권오식
협 조
	주무관			김달용
	주무관			이진영
	전문관			조양호
	주무관			성호준

『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

설계의 경제성(VE) 검토 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

설계의 경제성(VE) 검토 시행계획

『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』과 관련 설계의 경제성(VE) 검토를 시행하고자 함

1		용역개요

○ 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역

○ 용역기간 : ‘15. 9. 22 ~ ’17. 2. 27

○ 용 역 비 : 1,255백만원

○ 용역업체 : 범한엔지니어링 종합건축사사무소외 4개사

○ 사업내용

- 3차(총인)처리시설 439,200㎥/일 신설

- 비총인 계열 250,800㎥/일과 혼합방류

2		추진경과

○ ‘15.09.22 : 설계용역 착수

○ ‘16.07.05 : 기본설계 완료

○ ‘16.07.06 : 실시설계 착수

○ ‘16.09.08 : 용역 계약이관(물재생시설과 → 도시기반시설본부)

○ ‘16.09.13 : 계약업무 이관(재무과 → 도시기반시설본부)

○ ‘16.11.09 : 자문회의 개최

○ ‘16.12.05 : 설계용역 과업기간 연장

3		설계VE 시행계획

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 검토)

○ 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침           (국토교통부고시 제2016-101호, ‘16.3.8)

- 설계 VE 대상 : 총공사비 100억 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계

- 설계VE 검토 조직

‣ VE 책임자(Leader) : VE 전문교육 40시간 이상 이수자

‣ VE 퍼실리데이터     : VE 전문가 자격증 소지자

‣ VE 팀원 : 중요한 공종의 전문기술자 1인 이상 포함

□ 추진일정

○ 기 간 : 2017. 1. 4 ~ 2. 3

- VE위원 설계도서 배포         : 1.  4

- VE위원 설계도서 검토	: 1.  4 ~ 1. 12

- 현장답사 및 설계VE 워크숍    : 1. 13

- 이행회의	: 1. 25

- 설계VE 보고서 제출           : 2.  3

○ 세부일정

구 분		내 용	비 고
현장답사 및 VE 워크숍	일 정	∙ 1.13(금) 09:00 ~ 18:00	아이디어 창출 및 평가, 기술검토회의
	장 소	∙ 난지물재생센터 회의실
이행회의	일 정	∙ 1.25(수) 13:00 ~ 17:00	대안의 채택여부 결정
	장 소	∙ 난지물재생센터 회의실
참여자	VE 리더	∙ VE전문가 자격증 소지자	-
	퍼실리테이터	∙ VE전문가 자격증 소지자
	VE 위원	∙ VE 팀원(분야별기술전문위원) 상하수도, 토목, 기계, 전기, 건축
	원설계사	∙ 원설계 책임기술자

○ 설계VE 검토 조직구성

구 분		소 속	직 위	성 명	자격 또는 기술등급	전화번호	비 고
업무총괄		도시기반본부 열빛총괄과	과장	유 병 기	-	-	내부위원
간사		도시기반본부 열빛총괄과	담당	이 종 근	-	-	내부위원
VE리더		㈜삼영기술	이사	김 동 하	CVS	*************	VE전문가
퍼실리테이터		㈜삼영기술	과장	맹 미 현	CVS	*************	VE전문가
외부전문가	상하수도 (1)	㈜경호엔지니어링	부장	김 낙 영	특급기술자	*************	○
		㈜유퍼스텍	상무	박 경 순	상하수도기술사	*************
		㈜태성기술공사	이사	정 일 봉	상하수도기술사	*************
	토목 (1)	㈜한국종합기술	부장	정 광 민	박사	*************	○
		㈜도화엔지니어링	부사장	나 상 호	토목시공기술사	*************
		㈜경원엔지니어링	이사	이 창 수	토질및기초기술사	*************
	기 계 (1)	㈜도화엔지니어링	상무	정 경 철	산업기계설비기술사	*************	○
		㈜동부엔지니어링	부사장	김 상 배	유체기계기술사	*************
		㈜삼안	상무	류 인 영	산업기계설비기술사	*************
	전 기 (1)	㈜진전기엔지니어링	전무	기 유 경	건축전기기술사	*************	○
		㈜엔탑	부사장	심 종 석	건축전기기술사	*************
		㈜이산	전무	곽 노 진	발송배전기술사	*************
	건축 (1)	건축구조연구소.다우	대표	박 정 현	박사	*************	○
		㈜에이드건축사사무소	소장	정 재 권	건축사	*************
		㈜유림피앤씨	대표	유 훈 조	건축사	*************

4		보고자 의견

○『엔지니어링산업 진흥법』에 의한 엔지니어링사업자로서 VE수행 전문가 자격을 보유하고 하수처리시설 설계VE를 다수 수행한 업체와 각 분야별 외부전문가 5인으로 설계 VE 조직을 구성하고자 하며

○ 설계용역사에 업무지시하여 설계의 경제성(VE) 검토 시행에 만전을 기하고저 함

5		향후계획

○ 2017. 1 :	실시설계 경제성 검토(VE)

○ 2017. 2 :	실시설계 완료.

붙임 1) VE 전문가 자격증 소지 현황 1부

2) 설계 VE 수행실적 1부