투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	상주감리(조경) 투입기간 연장 승인 통보

1.문서번호 : SMIH-14-20108

2.작성일자 : 2014-03-19 11:03:41

3.제    목 : 상주감리(조경) 투입기간 연장 승인 통보

4.내    용

가. 방재시설부-207(2014. 3.18.)호와 관련임.

나. 우리 본부에서 시행중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 외 1개소 전면 책임감리용역”과 관련하여 조경감리원 투입기간을 아래와 같이 승인하오니 감리업무에 철저를기하시기 바랍니다.

1) 아  래

구 분	직무분야	성명	당초 투입기간	연장 투입기간	비고
상주감리	조경	이의헌 (동명기술공단)	‘14.3.10. ~ 6.20 (기간중 1개월 배치계획됨)	‘14.3.20.~ 6.20. (3개월)	2개월 연장

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					03/20 최순철
협조자
시행			토목부-5298									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개